ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	
	от 19.12.2014г.                  № 537
	р.п. Гари

	О внесении изменений в Муниципальную
  программу «Доступное и комфортное жилье –  
	гражданам России» в Гаринском городском  
	округе на 2012 – 2016 годы» 

	В связи с обращением Управления по благоустройству Гаринского городского округа №4170 от 19.12.2014 г. о необходимости внесения в 2014 году изменений в Программу по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Гаринском городском округе на 2012 – 2016 годы», утвержденную постановлением главы Гаринского городского округа от 03.09.2012г. № 360 (с внесенными изменениями постановлениями главы Гаринского городского округа от 04.03.2013г. № 135, от 19.08.2013г. № 448, от 28.10.2013г. № 635, от 15.10.2013г. № 579, от 22.11.2013г. № 704, от 25.02.2014г. № 49, от 23.09.2014г. №  386, от 05.11.2014 г. № 462, 24.11.2014 г. № 498),
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Внести в План мероприятий 2014 года по выполнению Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Гаринском городском округе на 2012 – 2016 годы», следующие изменения:
1) уменьшить строку 5 «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда» на сумму 498 140 рублей;
2) уменьшить строку 29 «Обеспечение жильем малоимущих граждан» на сумму 75 000  рублей;
2. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Гаринском городском округе на 2012 – 2016 годы» в новой редакции, прилагается. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Гаринского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гаринского городского округа Семакину М.В.
	
Глава
Гаринского городского округа                                                           А.Г. Лыжин

Приложение № 1
к Муниципальной Программе 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Гаринском городском округе
на 2012 - 2016 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ» 
В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2012 - 2016 ГОДЫ

N    
строки	Наименование   
   мероприятия	Объем средств 
местного бюджета «х»	Объем средств 
областного бюджета «х»	Примечание	
		2012  
  год	2013  
  год	2014 год	2015  
  год	2016  
  год	2012 
 год	2013  
  год	2014  
  год	2015  
  год	2016  
  год		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	              
 НАПРАВЛЕНИЕ 1. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

2	Подготовка документов территориального планирования, разработка правил землепользования и застройки, градостроительной документации для жилищного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом
тыс. рублей      	3 450	1 598	-	-	-	7 000	5 990	-	-	-		

3	Обеспечение земельных участков инженерной  инфраструктурой в целях жилищного строительства, 
тыс. рублей      	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-		

4	Составление реестра и формирование земельных участков для жилищного строительства 
тыс. рублей      	-	200	112	100	100	-	-	-	-	-		

5	Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда
тыс. рублей
	1 073	2 506	1 652,96	1 300	1 300	-	-	-	-	-		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Текущий ремонт общедомового имущества муниципального жилищного фонда тыс. рублей			552,1									

6	Строительство и реконструкция жилых домов в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в рамках областной государственной целевой программы по развитию жилищного комплекса  в Свердловской области на 2011 - 2015 годы,       
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

7	Количество семей,         
переселенных из аварийного    
жилищного фонда, 
семей          	-	2	4	10	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на   01.01.2012
на учете состоит   16 семей  	

8	Развитие и модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры, 
тыс. рублей      	178	426	-	560	560	-	-	-	-	-		

9	Итого            
по направлению 15 968,06 тыс. рублей    
                               12 990 тыс. рублей	
4 701	
4 830	
2 317,06	
2 060	
2 060	

7 000	

5 990	

-	

-	

-		

10	                
НАПРАВЛЕНИЕ 2. ПОДДЕРЖКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ЖИЛЬЕ,                 
                                  В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ   

11
	Предоставление социальных выплат молодым семьям  на приобретение (строительство)  жилья            
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на   01.01.2012
на учете  
состоит 0 семей  	
12	Количество семей    
        	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

13
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы  долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам), проживающим в Гаринском городском округе         
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на  01.01.2012
на учете 0 семьи   	
14	семей            
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15
	Предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным  семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011 - 2015 годы   тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	По  состоянию 
на  01.01.2012
на учете  
состоит  1 семья   	
16	семей            	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
17	Итого            
по направлению        0 тыс. рублей
                              1 000 тыс. рублей      	
-	
-	
-	
-	
-	

-	

-	

-	

1 000	

-		
18	                   НАПРАВЛЕНИЕ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                   
                                                      ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН                      	

19
	Обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны            
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на  01.01.2012
на учете  
2 человека       	
20	число ветеранов  	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		

21
	Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих  детей-инвалидов  
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на  01.01.2012
на учете  
состоит  7 семей  	

22	число инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов  	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4		

23
	Обеспечение жильем инвалидов 
боевых действий I группы,        
вставших на учет, нуждающихся до 01.03.2005, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой
программы по развитию жилищного комплекса  в Свердловской области на 2011 -2015 годы        
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По  состоянию 
на  01.01.2012
на учете состоит 
1 человек       	

24	число инвалидов боевых действии I группы,  вставших на учет нуждающихся  до 01.03.2005    

	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25
	Обеспечение жильем молодых   
семей и молодых специалистов на селе          
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	По состоянию 
на  01.01.2012
на учете  
состоит  1 семья   	
26	число граждан    	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	кв. м            	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

28
	Обеспечение жильем граждан   
из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей        
тыс. рублей      	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

29	Обеспечение жильем малоимущих граждан. 
тыс. рублей      	3 687	2 189	1 532,7	4 400	4 400	-	-	-	-	-		

30	количество семей	-	4	4	4	4	-	-	-	-	-	По состоянию 
на  01.01.2012
на учете  
состоит  16 семей   	

31	Проведение инвентаризации и оформление технической документации на муниципальные объекты недвижимости
тыс. рублей      	-	600	300	600	600	-	-	-	-	-		
32	Возмещение расходов, оплата по исполнительному листу			29,6									
33	Итого
по направлению 18 338,3 тыс. рублей	3 687	2 789	1 862,3	5 000	5 000	

-	

-	

-	

-	

-		

33	Всего расходов на реализацию Программы,       
                                  48 296,36 тыс. рублей    												
	в том числе:     												

34	Средства 
местного бюджета  34 306,36  тыс. рублей     	
8 388	
7 619	
4 179,36	
7 060	
7 060

35	Средства         
областного  бюджета  13 990 тыс. руб.  						
7 000	
5 990
	
-	
1 000	
-		
Примечания.
<*> Подлежит ежегодному уточнению в связи с фактическим объемом финансирования средств, выделяемых из местного и областного бюджетов.
<**> Объем выплат и количество граждан и семей на обеспечение жильем определяется по мере распределения объема выплат в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области.

Приложение № 2
к Муниципальной Программе 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Гаринском городском округе
на 2012 - 2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Номер    
строки	Целевые показатели	Единица  
измерения	Значение целевого показателя на:	
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	

1	
Годовой объем ввода 
в эксплуатацию жилья
	
кв. м	
700	
750	
800	
850	
850	

2	
Коэффициент         
доступности жилья   
		
0,10	
0,11	
0,11	
0,12	
0,12