АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________№ ____
	      г. Устюжна

  О порядке проведения проверки 
инвестиционных   проектов на предмет
эффективности использования средств  
местного бюджета района, направляемых 
на капитальные вложения        

          В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", ст. 20 Устава района

администрация  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного  бюджета района, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  главу администрации  района (Кузнецов В.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава администрации Устюженского
муниципального района                                                           В.А. Кузнецов       

                                                                                        Приложение
                                                        к постановлению администрации
   Устюженского муниципального района
                                                                    от __________________ № _______

ПРАВИЛА
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета  района, направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета района, на предмет эффективности использования средств муниципального бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета района , направляемых на капитальные вложения, (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.
3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета района:
а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Устюженского муниципального района на подготовку (корректировку) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета района;
б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств местного бюджета района;
в) в виде субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств местного бюджета района и утверждению застройщиком (заказчиком).
4.Проверка осуществляется специалистами администрации района, курирующими сферу строительства, в соответствии с разработанной методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета района, направляемых на капитальные вложения (далее - методика).
Проверка осуществляется на основании  расчета интегральной оценки, проведенной муниципальным заказчиком, предполагаемым главным распорядителем средств по инвестиционным проектам, не включенным в долгосрочные (муниципальные) целевые программы (далее - заявители), в соответствии с методикой.
Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, независимо от их сметной стоимости. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в администрацию района для информации.
5. Плата за проведение проверки не взимается.
6. Отдел архитектуры и строительства (Голубева М.?) ведет в установленном им порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств муниципального бюджета, направляемых на капитальные вложения.

II. Критерии оценки эффективности использования средств
местного  бюджета района, направляемых на капитальные вложения

7. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета района, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития муниципального района, отраслевых программах, мероприятиях, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных (муниципальных) целевых программ, ведомственных целевых программ и соответствующих программ сельских поселений;
г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета района;
ж) наличие долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета района, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов;
з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасадов, машин и оборудования;
и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении которых в установленном законодательством порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы.
8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета района, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
а) значение количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта;
в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;
д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
9. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 7 настоящих Правил, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.
Для проведения указанной проверки главный распорядитель бюджетных средств представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в муниципальных районах области. В случае отсутствия их на территории Вологодской области - проект-аналог Российской Федерации (или иностранного государства). Главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства с проектом-аналогом по функциональному значению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
9.1. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 8 настоящих Правил, осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в реестр сметных нормативов. В случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами (абзац второй пункта 9 настоящих Правил).
10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется по формуле:
                                n
                        Эинт = SUM (qi x ki), где:
                               i=1

Эинт - интегральная оценка;
qi - балл оценки i-го критерия;
ki - весовой коэффициент i-го критерия в процентах;
n - общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 100 процентам.
 Форма расчета, перечень критериев оценки, значения весовых коэффициентов, а также требования к определению и обоснованию баллов оценки отражены в приложении 1 к настоящим Правилам. Расчет интегрального показателя выполняется отделом экономики, муниципального заказа и торговли администрации района  и передается в отдел архитектуры и строительства администрации района. Минимально допустимое значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

11. Заявители представляют в администрацию района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:
а) заявление на проведение проверки;
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, согласно приложению 2 к настоящим  Правилам;
в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
г) задание на проектирование в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
е) копию разрешения на строительство;
ж) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
и) документальное подтверждение каждого участника реализации проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);
к) копию положительного заключения об эффективности использования средств федерального бюджета и (или) областного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в целях создания объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, выданного в соответствии с законодательством, в случае, если предполагается софинансирование создания таких объектов за счет средств местного бюджета района;
л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.
12. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 11 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств местного бюджета района  на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета района  на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств  местного бюджета района.
13. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:
а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и др.) инвестиционного проекта;
б) цель и задачи инвестиционного проекта;
в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;
г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;
д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации, и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
14. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта;
в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
г) срок и этапы строительства;
д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;
з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
15. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;
б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.
16. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, администрация района устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.
17. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.
18. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
19. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 3 месяцев.

IV. Выдача заключения об эффективности
инвестиционного проекта капитального строительства

20. Результатом проверки является заключение финансового управления администрации района ( Беляева И.А.), содержащее выводы о соответствии или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета района, направляемых на капитальные вложения по форме согласно приложения 3 к Правилам.
21. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета района на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета района.
В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая предельная сметная стоимость) объекта капитального строительства или изменились показатели, предусмотренные пунктами "а" - "в" пункта 8 настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.
22. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета района , направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 21 настоящих Правил, является основанием для подготовки в установленном администрацией порядке предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета района на реализацию инвестиционного проекта.
23. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
24. Заключение подписывается главой администрации Устюженского муниципального района или уполномоченным им должностным лицом.

Приложение 1
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет
 эффективности использования средств
 местного бюджета  района, направляемых 
на капитальные вложения

РАСЧЕТ
интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

 N 
п/п	          Критерий оценки          	Вид показателя
оценки        
эффективности 	Допустимые  
баллы оценки	Баллы оценки
(qi) <*>	Весовые      
коэффициенты,
% (ki)       	Требования к определению баллов оценки	 Обоснование в подтверждении 	
 1.	Наличие четко сформулированных цели
и задач инвестиционного проекта    	 Качественный 	    1       
    0       		     10%     	балл 1 - присваивается при наличии    
четко сформулированных цели и задач   
инвестиционного проекта;              
балл 0 - присваивается при отсутствии 
четко сформулированных цели и задач   
инвестиционного проекта               	Цели и задачи изложены в     
пункте N 2 Паспорта          
инвестиционного проекта      	
 2.	Соответствие цели инвестиционного  
проекта приоритетам и целям,       
определенным в КИП социально- экономического развития района и
Программе социально-экономического 
развития района	 Качественный 	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - присваивается инвестиционному
проекту при соответствии его цели     
приоритетам и (или) целям,            
определенным в стратегических документах развития района;        
балл 0.5 - соответствие цели          
инвестиционного проекта Программе
социально-экономического развития     
района;                 
балл 0 - цель не соответствует        
приоритетам и целям, определенным в   
стратегических документах развития района  	Приводятся наименования и    
реквизиты соответствующих    
правовых актов  
(с указанием разделов,       
пунктов и т.п.)              	
 3.	Уровень софинансирования           
инвестиционного проекта за счет    
средств местного бюджета района	 Качественный 	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - применение механизма         
государственно-частного партнерства   
или софинансирование объекта за счет  
средств федерального и (или)          
областного бюджетов в размере более   
50% от стоимости инвестиционного      
проекта;                              
балл 0.5 - объем софинансирования за  
счет средств федерального и (или)     
областного бюджетов составляет от 10  
до 50% стоимости инвестиционного      
проекта;                              
балл 0 - отсутствие указания          
источников софинансирования           
инвестиционного проекта               	Пункт 14 Паспорта            
инвестиционного проекта      	
 4.	Отсутствие в достаточном объеме    
замещающей продукции (работ и      
услуг), производимой на территории 
района	 Качественный 	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - строительство или            
реконструкция (техническое            
перевооружение) объекта капитального  
строительства, без которого невозможно
осуществление полномочий муниципальным районом, отнесенных 
к предмету их ведения, при этом       
производство замещающей продукции     
(работ, услуг) на территории          
отсутствует;        
балл 0.5 - спрос на продукцию (работы,
услуги) с учетом производства         
замещающей продукции удовлетворяется  
не в полном объеме или в необходимом  
качестве;                             
балл 0 - спрос на продукцию (работы,  
услуги) с учетом производства         
замещающей продукции удовлетворяется в
полном объеме и в необходимом качестве	Пункты 10, 11 Паспорта       
инвестиционного проекта.     
Для обоснования соответствия 
критерию должны содержаться  
сведения об объемах,         
наименовании, производителях 
аналогичной и замещающей     
продукции (работ и услуг) с  
приведением соответствующих  
показателей по отрасли,      
предусмотренных Указом
Президента РФ от 28 апреля   
2008 N 607 "Об оценке        
эффективности деятельности   
органов местного             
самоуправления городских     
округов и муниципальных      
районов"                     	
 5.	Значения количественных показателей
(показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта            	Количественный	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - одновременное выполнение двух
следующих требований:                 
- наличие показателя (показателей),   
характеризующего непосредственные     
(прямые) результаты реализации        
инвестиционного проекта (мощность     
объекта капитального строительства,   
общая площадь объекта, общий          
строительный объем), с указанием      
единиц измерения в соответствии с     
Общероссийским классификатором единиц 
измерения;                            
- наличие не менее одного показателя  
(показателей), характеризующего       
конечные социально-экономические      
результаты реализации инвестиционного 
проекта;                              
балл 0.5 - наличие прямых показателей 
и отсутствие показателей (показателя),
характеризующих конечные социально-   
экономические результаты реализации   
инвестиционного проекта;              
балл 0 - отсутствие и прямых, и       
конечных показателей (показателя),    
характеризующих результаты реализации 
инвестиционного проекта               	Показатели приводятся в      
пункте N 15 Паспорта         
инвестиционного проекта      	
 6.	Соответствие проектной мощности    
создаваемого (реконструируемого,   
перевооружаемого) объекта          
капитального строительства к       
имеющейся потребности              	Количественный	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - проектная мощность           
(намечаемый объем производства        
продукции, оказания услуг, выполнения 
работ) создаваемого                   
(реконструируемого, перевооружаемого) 
в рамках реализации инвестиционного   
проекта объекта капитального          
строительства соответствует (или не   
удовлетворяет) потребности в данной   
продукции (услугах);                  
балл 0.5 - потребность в данной       
продукции (работах, услугах)          
обеспечивается уровнем использования  
проектной мощности создаваемого       
(реконструируемого) в рамках          
реализации инвестиционного проекта    
объекта капитального строительства в  
размере не менее 75%, но не более 100%
проектной мощности;                   
балл 0 - потребность в данной         
продукции (работах, услугах)          
обеспечивается уровнем использования  
проектной мощности создаваемого       
(реконструируемого) в рамках          
реализации инвестиционного проекта    
объекта капитального строительства в  
размере менее 75% проектной мощности  	Пункт N 9 Паспорта           
инвестиционного проекта.     
Орган администрации района , разработавший       
инвестиционный проект,       
приводит обоснование спроса  
(потребности) на услуги      
(работы, продукцию),         
создаваемые в результате     
реализации инвестиционного   
проекта, для обеспечения     
проектируемого (нормативного)
уровня использования         
проектной мощности объекта   
капитального строительства   	
 7.	Отношение проектной мощности       
создаваемого (реконструируемого)   
объекта капитального строительства 
к мощности, необходимой для        
производства продукции (работ,     
услуг) в объеме, необходимом для   
нужд муниципального района	Количественный	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - отношение проектной мощности 
создаваемого (реконструируемого,      
перевооружаемого) объекта капитального
строительства к мощности, необходимой 
для производства продукции (услуг) в  
объеме, предусмотренном для нужд      
района, не превышает 100%; 
балл 0.5 - отношение проектной        
мощности создаваемого                 
(реконструируемого, перевооружаемого) 
объекта капитального строительства к  
мощности, необходимой для производства
продукции (услуг) в объеме,           
предусмотренном для нужд муниципального района, составляет 100 - 150%;        
балл 0 - отношение проектной мощности 
создаваемого (реконструируемого,      
перевооружаемого) объекта капитального
строительства к мощности, необходимой 
для производства продукции (услуг) в  
объеме, предусмотренном для нужд      
муниципального района, превышает 150%     	Орган администрации района   
, разработавший       
инвестиционный проект,       
приводит обоснования спроса  
(потребности) на услуги      
(работы, продукцию),         
создаваемые в результате     
реализации инвестиционного   
проекта, для обеспечения     
проектируемого (нормативного)
уровня использования         
проектной мощности объекта   
капитального строительства   	
 8.	Отношение сметной стоимости        
инвестиционного проекта к значениям
количественных показателей         
(показателя) результатов реализации
инвестиционного проекта            	Количественный	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - значение отношения сметной   
стоимости объекта капитального        
строительства к количественным        
показателям (показателю) результатов  
реализации проекта не превышает       
аналогичного значения (значений)      
показателя (показателей) по проектам- 
аналогам;                             
балл 0.5 - значение отношения сметной 
стоимости предлагаемого объекта       
капитального строительства к его      
количественным показателям            
(показателю) превышает значения по    
проекту-аналогу не более чем на 5%;   
балл 0 - значение отношения сметной   
стоимости предлагаемого объекта       
капитального строительства к его      
количественным показателям            
(показателю) превышает значение       
указанного отношения по проекту-      
аналогу более чем на 5% или меньше 50%
значения указанного отношения по      
проекту-аналогу                       	Пункты N 12, 15 Паспорта     
инвестиционного проекта.     
Приведение сметной стоимости 
объектов капитального        
строительства по проектам-   
аналогам                     	
 9.	Наличие (объем) инженерной и       
транспортной инфраструктуры,       
необходимой для реализации         
инвестиционного проекта            	Количественный	    1       
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - присваивается в случаях:     
- если уже имеются все виды инженерной
и транспортной инфраструктуры в       
необходимых объемах,                  
- если для предполагаемого объекта    
капитального строительства в силу его 
функционального назначения инженерная 
и транспортная инфраструктура не      
требуется (например,                  
берегоукрепительные работы);          
балл 0.5 - инвестиционным проектом    
(целевой программой, действующей в    
соответствующем периоде; иным         
проектом, отобранным для              
финансирования за счет средств местного бюджета района, предусмотренных на    
реализацию муниципальной целевой      
программы) предусмотрены затраты на   
обеспечение планируемого объекта      
капитального строительства инженерной 
и транспортной инфраструктурой в      
необходимых объемах;                  
балл 0 - затраты на обеспечение       
планируемого объекта капитального     
строительства инженерной и            
транспортной инфраструктурой в        
необходимых объемах не предусмотрены  	Пункт N 16 Паспорта          
инвестиционного проекта      	
10.	Срок реализации инвестиционного    
проекта                            	Количественный	    1       
    0.75    
    0.5     
    0       		     10%     	балл 1 - присваивается инвестиционным 
проектам со сроком реализации не более
1 года;                               
балл 0.75 - присваивается             
инвестиционным проектам со сроком     
реализации свыше 1 года и не более 3  
лет;                                  
балл 0.5 - присваивается              
инвестиционным проектам со сроком     
реализации свыше 3 лет и не более 5   
лет;                                  
балл 0 - присваивается инвестиционным 
проектам со сроком реализации более 5 
лет                                   	Пункт N 7 Паспорта           
инвестиционного проекта      	

--------------------------------
<*> Рассчитывается отделом экономики, муниципального заказа и торговли администрации района на основании Паспорта инвестиционного проекта.

Приложение 2 
 к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет
 эффективности использования средств
 местного бюджета  района, направляемых 
на капитальные вложения
                                 
ФОРМА
ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________________________________________
2. Цели и задачи проекта___________________________________________
3. Программа ____________________________________________________
4. Инициатор проекта (орган администрации района)                 ________________________________________________________________
5. Обоснование необходимости проекта ________________________________________________________________
6. Вид     работ   (строительство,   реконструкция   объекта   капитального
строительства, иные инвестиции в основной капитал) ________________________________________________________________
7. Срок реализации инвестиционного проекта ________________________________
8.  Предлагаемая  форма  реализации проекта (полностью или частично за счет  бюджетных средств)__________________________________________
9. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту, обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта  _________________________________________________________________
                    (ссылка на подтверждающий документ)
10. Наличие положительного заключения государственной экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий __________________________________________________________________  (ссылка на документ, копия заключения прилагается)
11.  Сметная  стоимость  объекта  капитального  строительства по заключению государственной  экспертизы  в  ценах года его получения или предполагаемая (предельная)  стоимость  объекта  капитального  строительства  в ценах года представления  паспорта  инвестиционного  проекта  (нужное  подчеркнуть)  с указанием года ее определения - ______ г. ___________________ в млн. рублей (включая  НДС/без  НДС  - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ______________________________________________________,
в  том  числе  затраты  на подготовку проектной документации (указываются в ценах   года   представления  паспорта  инвестиционного  проекта,  а  также
рассчитанные    в    ценах    соответствующих    лет),    млн.   рублей <1>
_______________________________________________________
12. Технико-экономические показатели проекта-аналога (при необходимости).
__________________________________________________________________
<1> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств местного бюджета района.

13. Технологическая структура капитальных вложений:

Наименование                           	Сметная стоимость, включая НДС, в
текущих ценах <2>/в ценах        
соответствующих лет (млн. рублей)	
Сметная стоимость инвестиционного      
проекта, в том числе:                  		
- строительно-монтажные работы, из них 
дорогостоящие материалы, художественные
изделия для отделки интерьеров и фасада		
- Приобретение машин и оборудования, из
них дорогостоящие и (или) импортные    
машины и оборудование                  		
- Инженерное обеспечение объекта       
(инженерные сети)                      		
- Прочие затраты                       
1.                                     
2.                                     
3.                                     		

14. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:
Год       
реализации	Сметная  
стоимость
проекта  	Источники финансирования        
инвестиционного проекта         	
		средства
бюджета 
города  
Вологды 	средства
бюджетов
других  
уровней 	внебюджетные  
источники     
финансирования	
всего, в  
том числе 
по годам: 					
20__ год  					
20__ год  					
20__ год  					
15. Количественные     показатели   (показатель)   результатов   реализации
инвестиционного проекта __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.
 <2> __________________________________________________________________

Заявитель                                  _________ ______________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
                                             М.П.

--------------------------------
<1>  Пункт заполняется в зависимости от пункта 6 Паспорта инвестиционного проекта
<2> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в пункте 11 настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение N 3
к Правилам проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет
 эффективности использования средств
 местного бюджета  района, направляемых 
на капитальные вложения

Форма

                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              протоколом заседания Комиссии
                                              по повышению результативности
                                              бюджетных расходов
                                              от ___________ N ______

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки инвестиционного проекта  на предмет эффективности использования средств местного бюджета района, направляемых   на капитальные вложения

    1.  Сведения  об  инвестиционном проекте, представленном для проведения
проверки  на  предмет  эффективности  использования  средств местного бюджета района,   направляемых   на   капитальные   вложения,   согласно  Паспорту
инвестиционного проекта
    Наименование инвестиционного проекта: ________________________________.
    Наименование   органа,  разработавшего  инвестиционный проект: ___________________________________________________.
    Срок реализации инвестиционного проекта: _____________________________.
    Значения    количественных    показателей    (показателя)    реализации
инвестиционного   проекта   с   указанием   единиц   измерения  показателей
(показателя): ____________________________________________________________.
    Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего, тыс. рублей: _______.
    2.  Оценка  эффективности использования средств местного бюджета района,
направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту - значение
интегральной оценки эффективности в процентах ____________________________.
    3.   Заключение  о  результатах  проверки  инвестиционного  проекта  на
предмет   эффективности   использования  средств местного  бюджета  района,
направляемых на капитальные вложения: _____________________________________
                                                   (пояснения)
Руководитель (лицо, исполняющее
обязанности руководителя)
_________ ___________________________
                                      (подпись)          (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__ г.