\ql
	
Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 N 985
(ред. от 12.12.2013)
"О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.02.2014

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2009 г. N 985

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105,
от 05.12.2011 N 1005, от 21.06.2012 N 617, от 18.12.2012 N 1332,
от 12.12.2013 N 1151)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии в 2009 - 2015 годах региональных целевых программ учитывать положения Программы.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 985

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105,
от 05.12.2011 N 1005, от 21.06.2012 N 617,
от 18.12.2012 N 1332, от 12.12.2013 N 1151)

ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

Наименование Программы        -  федеральная целевая программа "Развитие
                                 телерадиовещания в Российской Федерации
                                 на 2009 - 2015 годы"

Основание для разработки      -  распоряжение Правительства Российской
Программы                        Федерации от 21 сентября 2009 г.
                                 N 1349-р

Государственный заказчик -    -  Министерство связи и массовых
координатор Программы            коммуникаций Российской Федерации

Государственные заказчики     -  Министерство связи и массовых
Программы                        коммуникаций Российской Федерации,
                                 Федеральное агентство связи,
                                 Федеральное агентство по печати
                                 и массовым коммуникациям

Основные разработчики         -  Министерство связи и массовых
Программы                        коммуникаций Российской Федерации,
                                 федеральное государственное унитарное
                                 предприятие "Российская телевизионная и
                                 радиовещательная сеть",
                                 федеральное государственное унитарное
                                 предприятие "Космическая связь"

Цели Программы                -  развитие информационного пространства
                                 Российской Федерации;
                                 обеспечение населения многоканальным
                                 вещанием с гарантированным
                                 предоставлением общероссийских
                                 обязательных общедоступных телеканалов
                                 и радиоканалов заданного качества;
                                 повышение эффективности функционирования
                                 телерадиовещания

Задачи Программы              -  модернизация инфраструктуры
                                 государственных сетей телевещания;
                                 перевод государственных сетей
                                 телерадиовещания на цифровые технологии;
                                 обеспечение потребностей распределения
                                 телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
                                 обеспечение возможности повсеместного
                                 регионального цифрового вещания;
                                 развитие новых видов телевизионного
                                 вещания, включая телевидение высокой
                                 четкости и с элементами
                                 интерактивности
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

Важнейшие целевые индикаторы  -  численность населения Российской
и показатели Программы           Федерации, не охваченного телевещанием,
                                 на конечном этапе реализации Программы
                                 должна быть меньше тысячи человек;
                                 доля населения Российской Федерации,
                                 имеющего возможность приема
                                 общероссийских обязательных
                                 общедоступных телеканалов и
                                 радиоканалов, - 100 процентов;
                                 площадь территории субъектов Российской
                                 Федерации, охваченных наземным цифровым
                                 вещанием общероссийских обязательных
                                 общедоступных телеканалов и
                                 радиоканалов (с охватом не менее 50
                                 процентов населения субъекта Российской
                                 Федерации), - 17098246 кв. километров;
                                 доля населения Российской Федерации,
                                 имеющего возможность приема 20
                                 телеканалов свободного доступа, - 98
                                 процентов;
                                 доля населения Российской Федерации,
                                 имеющего возможность приема эфирных
                                 цифровых телерадиоканалов, - 98,3
                                 процента;
                                 количество субъектов Российской
                                 Федерации, охваченных цифровым
                                 телевещанием (с охватом не менее 95
                                 процентов населения субъекта Российской
                                 Федерации), - 83 единицы;
                                 доля населения Российской Федерации, не
                                 охваченного региональным телевещанием, -
                                 1,7 процента;
                                 доля населения Российской Федерации,
                                 охваченного цифровым эфирным
                                 телерадиооповещением о чрезвычайных
                                 ситуациях, - 98,3 процента
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от  21.06.2012
N 617, от 12.12.2013 N 1151)

Срок и этапы реализации       -  2009 - 2015 годы:
Программы                        первый этап - 2009 год;
                                 второй этап - 2010 - 2015 годы

Объем и источники             -  всего по Программе предусматривается
финансирования Программы         121737,36 млн. рублей (в ценах
                                 соответствующих лет), в том числе:
                                 за счет средств федерального бюджета -
                                 74671,985 млн. рублей (в ценах
                                 соответствующих лет),
                                 из них:
                                 капитальные вложения - 44454,73 млн.
                                 рублей;
                                 прочие нужды - 30217,255 млн. рублей;
                                 за счет средств внебюджетных источников
                                 - 47065,375 млн. рублей,
                                 из них:
                                 капитальные вложения - 26738,416 млн.
                                 рублей;
                                 прочие нужды - 20326,959 млн. рублей
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от  21.06.2012
N 617, от 12.12.2013 N 1151)

Ожидаемые конечные            -  обеспечение 100 процентов населения
результаты реализации            Российской Федерации в местах
Программы и показатели ее        постоянного проживания многоканальным
социально-экономической          цифровым телевещанием с гарантированным
эффективности                    предоставлением общероссийских
                                 обязательных общедоступных телеканалов и
                                 радиоканалов;
                                 обеспечение возможности доступа всего
                                 населения Российской Федерации к
                                 комплексным телекоммуникационным
                                 услугам, в том числе к широкому выбору
                                 телевизионных каналов в каждом
                                 домохозяйстве;
                                 высвобождение и последующее рациональное
                                 использование ограниченного
                                 радиочастотного ресурса в масштабах
                                 страны;
                                 рост доли отрасли телерадиовещания в
                                 валовом внутреннем продукте страны
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Состояние телерадиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1349-р, а также с учетом важнейших положений Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. N 1700-р.
Основу государственной системы телерадиовещания составляют федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", открытое акционерное общество "Первый канал", федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь", федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино".
Наземный сегмент государственной телевизионной и радиовещательной сети составляют региональные, республиканские, краевые и областные радиотелевизионные передающие центры, входящие в состав единого государственного оператора телерадиовещания федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - государственный оператор связи), ответственного за эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов (далее - обязательные телерадиоканалы) на всей территории Российской Федерации, а также за создание и развертывание цифровых наземных сетей для эфирной трансляции обязательных телерадиоканалов, вещание которых осуществляется телерадиовещательными организациями - федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытым акционерным обществом "Первый канал", открытым акционерным обществом "Телерадиокомпания "Петербург", открытым акционерным обществом "Телекомпания НТВ", закрытым акционерным обществом "Карусель", автономной некоммерческой организацией "Общественное телевидение России" и открытым акционерным обществом "ТВ Центр".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332, от 12.12.2013 N 1151)
К настоящему времени в Российской Федерации имеются существенные различия в доступности эфирных телевизионных каналов для населения в различных регионах страны, при этом около 1,6 млн. человек, проживающих примерно в 10 тыс. населенных пунктах, не охвачено телевизионным вещанием, а более 3 млн. человек имеют возможность принимать лишь одну телевизионную программу. Ухудшилась ситуация с внутрироссийским государственным радиовещанием, что характеризуется суммарным сокращением охвата вещанием более чем на 25 млн. человек и низким, не более 70 процентов городского населения страны, показателем охвата качественным стереофоническим УКВ-ЧМ-вещанием. Значительно ухудшились качество и надежность вещания на зарубежные страны. В результате снижения загрузки и мощности передатчиков государственное радиовещание сегодня не может в полном объеме выполнять функцию оповещения в чрезвычайных ситуациях, что является одной из основных обязанностей таких радиостанций, как "Радио России" и "Маяк".
Доведение охвата населения Российской Федерации многоканальным вещанием до современного уровня требует организации трансляции новых телерадиоканалов, однако распространение телерадиоканалов в общероссийском масштабе в аналоговом формате является на сегодняшний день энерго-, материало- и трудозатратным.
С учетом ограниченности свободного радиочастотного ресурса модернизация аналоговых сетей вещания по принципу воспроизводства становится бесперспективной, а развитие - невозможным.
Так как основу информационного обеспечения населения страны составляет созданная в течение нескольких десятилетий государственная система бесплатного наземного эфирного телерадиовещания, то задачи обновления инфраструктуры наземного вещания и перехода на современные цифровые технологии подготовки и трансляции телерадиоканалов носят неотложный характер и имеют первостепенное значение в соответствии с приоритетами развития Российской Федерации. Существенным фактором, определяющим сроки реализации Программы, является решение Международного союза электросвязи, принятое на конференции по планированию наземного цифрового вещания "Женева-06", устанавливающее срок окончания переходного периода на цифровое наземное эфирное вещание - 2015 год.
Решение указанных проблем невозможно без участия государства и использования программно-целевого метода, так как инфраструктура бесплатного наземного телерадиовещания и радиочастотный ресурс находятся в федеральной собственности, мероприятия по развитию телерадиовещания требуют межрегиональной и межотраслевой координации и их реализация в установленные сроки требует внедрения принципов индикативного бюджетного планирования, ориентированного на результат.
При подготовке Программы был проведен анализ различных вариантов решения проблемы развития телерадиовещания и перехода на цифровые технологии, а также дана оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения этой проблемы.
В случае развития телерадиовещания на коммерческой основе без применения мер государственной поддержки на цифровое вещание в первую очередь будут переведены крупные города из-за необходимости окупаемости инвестиционных вложений для реализации Программы, а в сельских и труднодоступных регионах этот процесс может растянуться на десятилетия. По этой же причине произойдет снижение объема (в некоторых регионах - ликвидация) бесплатно оказываемых услуг телерадиовещания населению. В результате в целях исключения диспропорций в охвате населения многопрограммным вещанием и снижения социальной напряженности сохранится на неопределенный срок необходимость содержания существующей аналоговой государственной инфраструктуры вещания, в том числе за счет средств федерального бюджета. Помимо этого возникает опасность выхода за рамки установленного Международным союзом электросвязи срока перехода от аналогового к цифровому телевещанию до 2015 года даже в критически важных приграничных регионах.
Такой риск полностью устраняет социально ориентированный вариант, основанный на применении мер государственной поддержки развития телерадиовещания. Это подразумевает, в частности, первоочередное выделение радиочастотного ресурса для целей эфирной цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов, создание и развертывание во всех регионах Российской Федерации в плановом порядке за счет средств федерального бюджета цифровых наземных сетей государственного оператора связи по трансляции обязательных телерадиоканалов, а также бюджетное субсидирование цифровой трансляции обязательных телерадиоканалов. Существующий порядок предоставления услуг телерадиовещания населению на бесплатной основе сохранится, что обеспечит создание единого информационного и культурного пространства, приемлемый баланс между социально значимыми и коммерческими общедоступными услугами вещания, а также равномерность развития субъектов Российской Федерации по уровню доступности услуг телерадиовещания.
При переходе на повсеместный прием цифровых телеканалов существенным фактором риска достижения целей Программы является степень насыщения цифровым приемным оборудованием абонентов как наземного, так и спутникового непосредственного телевизионного вещания. Недостаточная степень насыщения цифровым приемным оборудованием в каком-либо регионе на момент завершения Программы не позволит проводить отключение аналоговых телеканалов, потребует дополнительного поддержания параллельного аналогового и цифрового вещания и ограничит эффективное использование радиочастотного спектра. В целях минимизации риска планируется проведение массовой кампании среди населения по разъяснению всех вопросов внедрения цифрового телерадиовещания, информированию о сроках, об этапах и о порядке перехода на цифровое вещание в каждом регионе. Помимо этого планируется разработка комплекса поощрительных мер для российских предприятий - производителей бытовых устройств систем цифрового вещания и приема, а также ввод ограничений в отношении производства российского телевизионного приемного оборудования, не оснащенного блоком приема цифровых каналов, и импорта такого оборудования.
Принятые решения позволят сократить срок перехода на цифровое вещание в стране до 4 - 5 лет и сэкономить значительные средства федерального бюджета на поддержание аналоговой сети вещания, а планомерное и повсеместное внедрение новых технологий на государственных сетях вещания создаст базу для интенсивного развития всей отрасли телерадиовещания.
Указанные направления и результаты реализации Программы соответствуют приоритетным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в сфере культуры и средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

Целями Программы являются развитие информационного пространства Российской Федерации, обеспечение населения многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышение эффективности функционирования телерадиовещания.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
модернизация инфраструктуры государственных сетей телевещания;
перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии;
обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;
обеспечение возможности повсеместного регионального цифрового вещания;
развитие новых видов телевещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.
Реализация Программы осуществляется в 2009 - 2015 годах в 2 этапа.
На первом этапе Программы (2009 год) предусматривается обеспечение условий для перехода на цифровой формат распространения программ. На этом этапе осуществляются:
разработка, экспертиза и утверждение системных проектов для 1-й очереди строительства сетей цифрового телевизионного вещания в регионах;
начало строительства сетей цифрового вещания в регионах с целью отработки планируемых к реализации технологических решений;
подготовка к проектированию и созданию космических аппаратов в целях их своевременного вывода на орбиту и обеспечения задач трансляции частотным ресурсом.
На втором этапе Программы (2010 - 2015 годы) осуществляются реализация запланированных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, создание условий для последовательного отключения аналогового вещания в стране и завершение создания единого информационного пространства в Российской Федерации, в том числе:
модернизация и расширение существующей инфраструктуры телевещания (реконструкция, техническое перевооружение сети антенно-мачтовых сооружений, объектов инженерного обеспечения, замена аварийных сооружений и объектов);
строительство цифровых наземных вещательных сетей для распространения обязательных телерадиоканалов и иных каналов свободного доступа;
создание и запуск спутников связи и вещания;
информационно-разъяснительные мероприятия по обеспечению успешного и планомерного внедрения цифрового вещания в Российской Федерации;
создание системы цифровизации архивных материалов.
По завершении реализации Программы планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:
численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием, на конечном этапе реализации Программы должна быть меньше тысячи человек;
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов, - 100 процентов;
площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 17098246 кв. километров;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа, - 98 процентов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов, - 98,3 процента;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов, - 83 единицы;
количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;
количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации), - 83 единицы;
доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием, - 1,7 процента;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях, - 98,3 процента.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы в качестве показателя применяется количество введенных в эксплуатацию:
объектов опытных зон цифрового вещания (единиц);
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса (единиц);
центров формирования мультиплексов (единиц);
объектов сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (единиц);
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов (единиц);
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении N 1.
В ходе реализации Программы Правительством Российской Федерации по предложению Министерства экономического развития Российской Федерации может быть принято решение о досрочном прекращении ее реализации в следующих случаях:
при принятии Правительством Российской Федерации решения о сокращении объемов финансирования за счет средств федерального бюджета мероприятий Программы по сравнению с предусмотренными объемами и отсутствии возможности обеспечения государственным заказчиком - координатором Программы дополнительного финансирования ее мероприятий за счет средств внебюджетных источников;
при выявлении по результатам независимой экспертизы Программы несоответствия результатов ее выполнения целевым индикаторам и показателям, предусмотренным Программой;
при непредставлении государственным заказчиком - координатором Программы в надлежащей форме и в надлежащие сроки отчетности о результатах реализации Программы за истекший год, включая оценку значений ее целевых индикаторов и показателей.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Система мероприятий Программы строится в соответствии со следующими принципами:
комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата и согласованность использования государственной поддержки;
повышение эффективности использования государственной собственности при максимальном соблюдении интересов безопасности государства;
концентрация ресурсов на инфраструктурных объектах, имеющих федеральное и межрегиональное значение и обеспечивающих основу развития отрасли;
государственно-частное партнерство и привлечение средств внебюджетных источников для выполнения мероприятий Программы, которые могут иметь коммерческую направленность;
распределение средств федерального бюджета на конкурсной основе.
Перечень мероприятий Программы, источников и направлений их финансирования приведен в приложении N 2.

1. Строительство наземных сетей цифрового
телевизионного вещания

Мероприятие по разработке системных проектов
сетей цифрового телевизионного вещания по регионам
(2009 - 2012 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

В целях оптимального использования частотного ресурса и финансовых средств, безошибочного планирования схем сетей цифрового телевизионного вещания, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации разработку системных проектов сети цифрового телевизионного вещания целесообразно осуществлять для каждого региона Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
Системные проекты разрабатываются в соответствии с нормативными документами, техническими нормами и правилами, используемыми в проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов цифрового телерадиовещания, и отражают:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
организацию связи и порядок оказания услуг связи;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
системы электроснабжения и электропитания;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
инженерную структуру объектов связи;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
правила применения оборудования сетей телевизионного вещания.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
Системный проект сетей цифрового вещания должен обеспечивать возможность выполнения сетью цифрового телевизионного вещания каждого региона следующих функций:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
формирование и кодирование цифрового пакета телевизионных и радиопрограмм с учетом источников их получения (магистральные и зоновые линии передачи);
доставка цифрового пакета телевизионных и радиопрограмм до радиотелевизионных передающих станций на территории региона с использованием существующих и создаваемых сетей доставки сигнала;
цифровое эфирное вещание с формированием зоны обслуживания с заданным уровнем напряженности поля для обеспечения охвата населения региона в соответствии с принятым частотным планом сети;
контроль и управление работой средств сети цифрового телевизионного вещания.
Исходя из средней стоимости разработки и экспертизы системного проекта сетей цифрового телевизионного вещания и планируемых проектов в количестве 82 единицы, общий объем финансирования мероприятия определен в размере 596 млн. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 21.06.2012 N 617)
По итогам системного проектирования разрабатывается проектная документация для строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания и центров формирования мультиплексов в каждом субъекте Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

Мероприятие по развитию сети вещания 1-го
мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания
1-го мультиплекса) (2009 - 2015 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)

Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации с выделением этапов строительства, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", приведенной в приложении N 2.1. На основе системных проектов разрабатывается проектная документация по каждому инвестиционному проекту, которой определяется состав объектов капитального строительства, мощность каждого объекта и площадки строительства для развертывания сети вещания 1-го мультиплекса с учетом возможной модернизации и расширения имеющейся инфраструктуры государственной сети телерадиовещания. Инвестиционные проекты включают в различном сочетании строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объектов капитального строительства. Количество объектов цифровой сети 1-го мультиплекса составляет 5017 единиц.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Создаваемая сеть имеет следующие основные технические и эксплуатационные характеристики:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
стандарт вещания - DVB-T2, цифровая компрессия - MPEG-4;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
оборудование позволяет использовать системы условного доступа в соответствии со стандартами, принятыми вещательными компаниями;
исходя из требований и нормативов эксплуатационной надежности, осуществляется резервирование оборудования, а также обеспечивается возможность дистанционного контроля и управления;
оборудование работает в круглосуточном режиме;
оборудование обеспечивает возможность совмещения федерального спутникового и регионального пакетов телерадиопрограмм в пункте вещания;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
приемное и передающее цифровое оборудование и антенно-фидерные устройства размещаются на технических объектах с максимальным использованием существующих систем инженерных коммуникаций.
Создание сети 1-го мультиплекса в регионах начинается в соответствии с частотно-территориальным и территориально-временным планом развертывания сетей цифрового вещания с приоритетом приграничных районов Российской Федерации, планы переходного периода в которых требуют незамедлительной координации с сопредельными странами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
Регионами 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы) являются 12 регионов, 1387 пунктов вещания, с объемом финансирования 8463,09 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5084,902 млн. рублей, в частности Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Регионами 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 - 2015 годы) являются 27 регионов, 1341 пунктов вещания, с объемом финансирования 15843,081 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11804,774 млн. рублей, в частности Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Краснодарский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Ленинградская область, Мурманская область, Оренбургская область, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, Тюменская область, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Регионами 3-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2015 годы) являются 39 регионов, 1645 пункт вещания, с объемом финансирования 22569,347 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18522,328 млн. рублей, в частности Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Ставропольский край, Архангельская область, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Регионами 4-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2012 - 2015 годы) являются 5 регионов, 644 пункта вещания, с объемом финансирования 5921,682 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5240,476 млн. рублей, в частности Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объектам 1-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания осуществляется за счет внебюджетных источников, по объектам 2-й, 3-й, 4-й очередей - за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 21.06.2012 N 617)
Подготовка к переходу на цифровое наземное вещание в регионе включает:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
разработку системного проекта сети цифрового телевизионного вещания в регионе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
выделение земельных участков для нового строительства и их надлежащее оформление;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
проведение необходимых инженерных изысканий;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
разработку проектной документации на объекты сети региона, определенные по результатам системного проектирования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
выполнение необходимых обеспечивающих мероприятий и технологическое присоединение к энергосетям;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
реконструкцию, техническое перевооружение и в случае необходимости замену существующих антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и объектов систем энергоснабжения;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
ввод оператором связи в эксплуатацию сети цифрового вещания 1-го мультиплекса с охватом вещания, эквивалентным зоне аналогового вещания в регионе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
мониторинг обеспеченности абонентскими цифровыми приставками домохозяйств, принимающих телевизионный сигнал в регионе по эфиру.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 617.
Виды, объем и стоимость работ по реконструкции, техническому перевооружению и в случае необходимости замене антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств и объектов систем энергоснабжения для каждого объекта капитального строительства определяются по результатам обследований в ходе разработки проектной документации на укрупненные инвестиционные проекты.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)
В целях отработки технологических решений построения сетей цифрового вещания в рамках Программы и в соответствии с частотно-территориальным планом предусматривается строительство в 2009 - 2011 годах за счет средств внебюджетных источников опытных зон цифрового вещания в 8 регионах. Так, в Курской области, Калининградской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, Хабаровском крае, Магаданской области и Камчатском крае планируется строительство 58 внеочередных объектов на сумму 751,4 млн. рублей из общего количества объектов 1-й, 2-й и 3-й очередей создания сетей цифрового вещания.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
В последующем созданные объекты будут интегрированы в цифровую сеть государственного оператора связи.
Для обеспечения доставки пакетов каналов до пунктов эфирного вещания внутри региона планируется в ряде регионов создание наземных распределительных сетей протяженностью ориентировочно 23040 канало-километров с объемом финансирования за счет средств внебюджетных источников 2476,803 млн. рублей.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Общий объем финансирования мероприятия составляет 55274,003 млн. рублей, в том числе 40652,48 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Координация в рамках Программы процессов замены передатчиков, ввода цифрового вещательного оборудования с реконструкцией антенно-мачтовых сооружений и заменой антенно-фидерных устройств обеспечивает итоговую оптимальность технических решений, экономическую эффективность реализации Программы и последующее функционирование сети.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)

Мероприятие по строительству, техническому перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010 - 2014 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

(введено Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105)

Сети цифрового вещания создаются для обеспечения возможности модификации общероссийских каналов в соответствии с потребностями региона, а также с целью распространения в каждом регионе местных каналов в создаваемых сетях цифрового вещания. Реализация этого мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) осуществляется посредством его детализации на соответствующие инвестиционные проекты по каждому субъекту Российской Федерации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе. По этому мероприятию на базе радиотелевизионных передающих центров государственного оператора связи создаются центры формирования мультиплексов, обеспечивающие прием телерадиоканалов со спутников и из местных студий, их обработку, включение местных врезок, формирование и последующую подачу пакета каналов на спутниковые и (или) наземные распределительные региональные сети связи. Реализация мероприятия позволит значительно сократить долю населения Российской Федерации, не охваченного региональным вещанием. Объем средств на создание центра формирования мультиплексов в стандарте DVB-T2 составляет в среднем 42,15 млн. рублей, что в целом по Программе составит 3498,245 млн. рублей, в том числе 2535 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)

Мероприятие по реконструкции, техническому перевооружению
и замене антенно-мачтовых сооружений (2012 - 2015 годы)

Исключено. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105.

Мероприятие по строительству антенно-мачтовых сооружений
для улучшения зон охвата (2012 - 2015 годы)

Исключено. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105.

Мероприятие по реконструкции и замене антенно-фидерных
устройств (2012 - 2015 годы)

Исключено. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105.

Мероприятие по реконструкции и строительству объектов
энергоснабжения сети телерадиовещания (2012 - 2015 годы)

Исключено. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105.

Мероприятие по оснащению контрольно-измерительным
оборудованием (2009 - 2013 годы)

Создание и последующая эксплуатация сетей цифрового телевизионного вещания требует оснащения эксплуатационных служб государственного оператора связи соответствующим контрольно-измерительным оборудованием. Типовой комплекс измерительного оборудования для систем DVB-T2 в минимальной комплектации включает генератор телевизионного сигнала и тестовый приемник (переносной комплект), а в полной комплектации - дополнительно к ним анализатор спектра и анализатор транспортного потока (стационарный комплект). Первоначальное количество необходимых стационарных и переносных комплектов контрольно-измерительного оборудования планируется исходя из распределения пунктов вещания по мощности и количеству вещательного оборудования - соответственно 300 комплектов на общую сумму 697,1 млн. рублей и 500 комплектов на сумму 532,997 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
В последующем состав и количество контрольно-измерительного оборудования корректируется на базе опыта эксплуатации сети цифрового телевизионного вещания.
В рамках этого мероприятия предусматривается предоставление субсидии государственному оператору связи на приобретение в 2012 - 2013 годах контрольно-измерительного оборудования для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения возможности настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)

Мероприятие по созданию сети цифрового вещания
2-го мультиплекса (2013 - 2015 годы)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

В соответствии с частотно-территориальным планом, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса государственный оператор связи в регионах последовательно вводит сеть цифрового телевизионного вещания каналов 2-го мультиплекса. Так как сеть цифрового вещания 2-го мультиплекса базируется на инженерной инфраструктуре сети 1-го мультиплекса (земельные участки, технологические здания, антенно-мачтовые сооружения, системы энергообеспечения, системы контроля и мониторинга), то капитальные вложения для организации вещания 2-го мультиплекса с зоной охвата не менее 98 процентов населения, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса, приняты эквивалентными затратам на создание сети цифрового телевизионного вещания 1-го мультиплекса в части телекоммуникационного оборудования. Стоимость создания сети цифрового телевизионного вещания 2-го мультиплекса составляет 14684 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

Мероприятие по строительству центров формирования
и доставки мультиплексов (2010 - 2013 годы)

Исключено. - Постановление Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105.

Мероприятие по организации необходимого количества
временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год)
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332,
от 12.12.2013 N 1151)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

Территория Российской Федерации по своей протяженности с востока на запад разделена на 5 вещательных зон в целях максимального учета поясного времени в регионе вещания. В связи с необходимостью формирования пакета программ обязательных телерадиоканалов (1-го мультиплекса) для необходимого количества временных дублей предполагается осуществить:
техническое перевооружение аппаратных федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и федерального государственного унитарного предприятия "Телевизионный технический центр "Останкино" в 2013 году на сумму 125 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;
дооснащение технического центра "Шаболовка" федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" оборудованием компрессии и мультиплексирования, работающим в стандарте MPEG-4/DVB-T2. Средства федерального бюджета будут направлены в 2013 году на приобретение оборудования. За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также закупка дополнительного оборудования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
дооснащение центров космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" в г. Дубна и пос. Долгое-Ледово (Московская область), г. Гусь-Хрустальном (Владимирская область), г. Железногорске (Красноярский край) и в г. Хабаровске дополнительным приемо-передающим оборудованием земных станций спутниковой связи. В 2013 году предусматривается выполнение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия и приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
закупку за счет средств федерального бюджета и установку за счет средств предприятия дополнительного каналообразующего оборудования для организации устойчивой подачи сигналов по существующим оптическим линиям связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь".
Размер субсидий из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на приобретение оборудования для организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов составит в 2013 году 225 млн. рублей. Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 36 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Общая стоимость мероприятия по организации необходимого количества временных дублей телерадиоканалов составит 379,75 млн. рублей, в том числе 343,75 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

Мероприятия по созданию дополнительных мультиплексов (2013 - 2015 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

В соответствии с частотно-территориальным планом и по согласованию с вещателями-заказчиками, а также по мере отключения отдельных каналов аналогового вещания и высвобождения частотного ресурса в городах и крупных населенных пунктах операторами связи на конкурсной основе осуществляется строительство сетей цифрового эфирного вещания для трансляции каналов дополнительных мультиплексов, включая также цифровые каналы в стандартах телевидения высокой четкости (HDTV). В указанных сетях планируется возможность предоставления зрителям интерактивных сервисов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Создание сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов предполагается в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек и иных населенных пунктах, привлекательных с точки зрения рекламного рынка, по согласованию с вещателями-заказчиками. Объем средств на создание сети вещания дополнительных мультиплексов составляет 3800 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 617.

2. Развитие наземного радиовещания

Исключен. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 617.

3. Создание многофункциональных космических аппаратов,
в том числе для телерадиовещания

Мероприятия по созданию космических аппаратов
"Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010 - 2013 годы), а также
по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7"
и "Экспресс-АМ8" (2011 - 2014 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

Планируемые к созданию в рамках Программы космические аппараты "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" должны стать основой для формирования современной орбитальной группировки, способной решать широкий спектр задач в области спутниковой связи и вещания. Работы по изготовлению ракет-носителей, разгонных блоков и обеспечение запусков предусмотрены Федеральной космической программой России на 2006 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2005 г. N 635 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 683).
При определении технических характеристик космических аппаратов "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6", "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" определяющими условиями являлось максимально полное использование заявленного Российской Федерацией орбитального частотного ресурса, преемственность существующих спутниковых сетей связи и своевременная замена космических аппаратов с заканчивающимся сроком активного существования.
Срок активного существования новых космических аппаратов - 15 лет, что позволит обеспечить потребителей на территории Российской Федерации надежными каналами связи с хорошими энергетическими характеристиками, в том числе для организации спутникового непосредственного телевизионного вещания.
В составе космических аппаратов предусмотрены ретрансляторы перспективного частотного Ка-диапазона, эффективные при использовании в организации сетей распределения телевизионных программ, широкополосной передачи данных, перегона телевизионных программ, в том числе высокой четкости, а также организации трансляций с передвижных репортажных телевизионных студий.
В 2013 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону и космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону. В 2014 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону и космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Создание космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" осуществляется за счет средств федерального бюджета в первые годы реализации Программы. Это обеспечит создание космической инфраструктуры распределения телевизионных каналов 1-го мультиплекса по всем временным вещательным зонам телерадиовещания. Доходы от эксплуатации введенных в состав орбитальной группировки новых космических аппаратов позволят федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" привлечь средства внебюджетных источников и обеспечить дальнейшее развертывание спутниковой группировки в интересах развития телерадиовещания в рамках Программы (создание космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" для распределения пакетов каналов последующих мультиплексов) без привлечения средств федерального бюджета.
Стоимость создания спутников составляет 24831,5 млн. рублей, в том числе 13000 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)

4. Создание центра управления фондовыми материалами
для их учета, реставрации и цифровизации (2012 - 2015 годы)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" по переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению к ним доступа и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
В настоящее время в состав архивных материалов федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" входят более 1,5 млн. единиц аудиовизуальных материалов, аудио- и фотоматериалов, активно использующихся при подготовке радио- и телепередач и программ различными средствами массовой информации, включая основные российские телеканалы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Носители, на которых записаны оригиналы произведений, не пригодны для долгосрочного хранения, и в настоящее время идет процесс их неизбежного разрушения.
В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм" (проектируемая площадь - 24099,2 кв. метров, объем хранилища - 16 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 12,5 тыс. часов фондовых материалов в год.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Реализация мероприятия предусматривает 2 следующих инвестиционных проекта:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
реконструкция производственного комплекса "Реутово", г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 1;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
строительство здания для хранения и работы с фондовыми аудиовидеоматериалами, г. Реутов, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 19, корп. 2.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Реконструкция зданий и сооружений указанного производственного комплекса с необходимым его оснащением технологическим и инженерным оборудованием (проектируемая площадь - 12127,2 кв. метра, объем хранилища 6 Пбайт) обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6 тыс. часов фондовых материалов в год.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
Срок реализации - 2012 - 2014 годы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Строительство здания будет осуществляться в рамках выполнения задачи создания уникального собрания киновидеоматериалов и звукозаписей отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием (проектируемая площадь - 11972 кв. метра, объем хранилища - 10 Пбайт), что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Срок реализации - 2012 - 2015 годы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Общий объем финансирования мероприятия составляет 1148,5 млн. рублей, в том числе на выполнение проектных и изыскательских работ - 67,3 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)

5. Оплата услуг связи по распространению обязательных
телеканалов в переходный период (2010 - 2015 годы)

Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332.

6. Информационно-разъяснительная кампания
(2010 - 2015 годы)

Одним из мероприятий, обеспечивающих успешное и планомерное внедрение цифрового вещания в Российской Федерации, является массовая информационно-разъяснительная кампания среди населения страны. В рамках мероприятия планируются разъяснение необходимости внедрения и преимуществ цифрового телерадиовещания, приобретения цифровых абонентских приемных устройств, информирование о сроках, об этапах и о порядке перехода на цифровое вещание в каждом регионе, а также консультирование по техническим вопросам. Для этих целей будут задействованы все основные центральные средства массовой информации, обеспечивающие доступ к максимальному числу жителей каждого региона, включая телевидение (рекламные и информационные блоки), радио, печатные издания, а также портал Программы в сети Интернет.
Общий объем финансирования этого мероприятия составляет 562,95 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

6(1). Предоставление государственному оператору связи
субсидий из федерального бюджета

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.12.2011 N 1005)

Мероприятие по предоставлению государственному
оператору связи субсидии на оплату услуг (работ),
обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий
по подготовке цифрового вещания
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)

В рамках этого мероприятия в 2010 году предусматривается предоставление субсидий государственному оператору связи по эфирной цифровой наземной трансляции на реализацию неотложных подготовительных мероприятий, связанных с организацией этой трансляции.
В ходе реализации подготовительных мероприятий по переходу на цифровое наземное вещание у государственного оператора связи возникает необходимость осуществить комплекс неотложных работ. Фактически возникают расходы, связанные с целями строительства (реконструкции) объектов Программы, на основании договоров, предметом которых является выполнение отдельных видов работ (услуг), связанных с подготовкой территории строительства и энергообеспечением объектов Программы (в части получения и реализации технических условий на технологическое присоединение).
Кроме того, требуется обеспечение распространения средствами спутниковой связи пакета общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов для проведения пусконаладочных работ на создаваемых сетях наземного цифрового эфирного вещания.
В связи с этим возникает необходимость компенсации фактически понесенных расходов государственному оператору связи, которые связаны со строительством (реконструкцией) объектов Программы и без осуществления которых выполнение подготовительных мероприятий не представляется возможным.
Общий объем субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Программы составит 667,2 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)

Мероприятие по предоставлению государственному
оператору связи субсидии на возмещение затрат (части
затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой
наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011
году в населенных пунктах с численностью населения менее
100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех
населенных пунктах Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)

В рамках этого мероприятия предусматривается предоставление субсидии государственному оператору связи по эфирной цифровой наземной трансляции на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации.
Субсидия предоставляется на возмещение производственно-хозяйственных затрат (части затрат), связанных с осуществлением качественного и бесперебойного вещания обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации.
Общий объем субсидии из федерального бюджета составляет 14792,905 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

7. Управление реализацией Программы (2010 - 2015 годы)

Мероприятия по управлению реализацией Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на реализацию Программы, и включают методическое, организационно-техническое, экспертное сопровождение реализации Программы (экспертиза проектов и результатов их выполнения) и контроль за ходом ее выполнения.
Для обеспечения эффективного управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации привлекает при необходимости внешних исполнителей по отдельным направлениям работ (независимая экспертиза, аудит, статистические исследования, маркетинговые исследования и другие виды работ).
Общий объем финансирования этого мероприятия составляет 272,1 млн. рублей.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 121737,36 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 74671,985 млн. рублей (в ценах соответствующих лет). Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведен в приложении N 3.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 12.12.2013 N 1151)
Общий объем финансирования Программы определен исходя из необходимости реализации различных категорий мероприятий Программы, в том числе их параметров (стоимость проекта, условия для привлечения средств внебюджетных источников, срок реализации и др.).
Важнейшим принципом реализации Программы является максимальное привлечение финансовых средств внебюджетных источников для выполнения тех мероприятий Программы, которые могут иметь коммерческую направленность. Для устойчивого финансирования мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников соответствующий государственный заказчик Программы включает необходимые требования в государственные контракты, заключаемые с исполнителями мероприятий Программы, подписывает с соответствующими организациями соглашения о намерениях или оформляет другие документы, подтверждающие финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников.
Доля средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников по основным направлениям Программы различна.
Средства федерального бюджета составляют 74671,985 млн. рублей (61,3 процента), в том числе на строительство наземной сети цифрового телевизионного вещания государственного оператора связи - 44228,33 млн. рублей, создание многофункциональных космических аппаратов - 13000 млн. рублей, оплату услуг по реализации неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания - 667,2 млн. рублей, возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, - 14792,905 млн. рублей, развитие системы цифровизации архивных материалов - 1148,5 млн. рублей, проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения - 562,95 млн. рублей и управление реализацией Программы - 272,1 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332, от 12.12.2013 N 1151)
Средства внебюджетных источников составляют 47065,375 млн. рублей, в том числе на строительство наземной сети цифрового телевизионного вещания государственного оператора связи - 35233,875 млн. рублей и на создание многофункциональных космических аппаратов - 11831,5 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)
При недостаточности внебюджетных средств соответствующие расходы на реализацию мероприятий Программы не могут быть осуществлены за счет средств федерального бюджета.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы являются:
обеспечение нормативного, методического и информационного единства Программы (формы контрактов и процедуры мониторинга выполнения мероприятий Программы);
обеспечение участия в управлении реализацией Программы представителей федеральных органов исполнительной власти, а также представителей предприятий отрасли.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд, заключаемых с исполнителями мероприятий Программы, а также на основе иных гражданско-правовых договоров.
Заказчиком-застройщиком по созданию и развертыванию сети вещания 1-го мультиплекса, а также мероприятий по модернизации, реконструкции, техническому перевооружению и замене действующей инфраструктуры является федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Исполнителями мероприятий, финансируемых за счет средств внебюджетных источников, планируются федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь".
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется после их детализации, проводимой в установленном порядке в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2.1 к Программе.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Финансирование инвестиционных проектов, входящих в состав мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), осуществляется в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований, выделенных на период реализации инвестиционного проекта, с возможностью авансирования работ в рамках проекта в объеме, не превышающем лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, и подтверждением всего объема финансирования по факту реализации инвестиционного проекта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Субсидия из федерального бюджета государственному оператору связи на оплату услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, возмещение затрат (части затрат) государственного оператора связи, связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, предоставляется в соответствии с Правилами предоставления в 2010 - 2015 годах из федерального бюджета субсидии организации, являющейся оператором связи, осуществляющим эфирную аналоговую и эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов на всей территории Российской Федерации, на оплату услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, возмещение затрат (части затрат) указанной организации, связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, и приобретение контрольно-измерительного оборудования, приведенными в приложении N 4.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
Субсидии из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на реализацию мероприятия по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов предоставляются в соответствии с Правилами предоставления в 2013 году из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат оператора связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов, приведенными в приложении N 4.1.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий Программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы, который уточняется 1 раз в полгода на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов.
Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях ее реализации, позволяющей отбирать наиболее перспективные проекты для финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в рамках реализации мероприятий Программы основываются на принципах взаимосвязанности, объективности, компетентности и независимости.
Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы, нормативных актах по управлению Программой и об условиях проведения конкурсов размещается на портале Программы в сети Интернет.
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы:
обеспечивает координацию деятельности государственных заказчиков по реализации мероприятий Программы;
вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
ежегодно при необходимости уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм ее реализации, состав участников Программы и в установленном порядке представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации корректировку Программы;
составляет детализированный организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;
подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения по объемам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;
представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы;
представляет в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации сведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы государственных контрактах (договорах) на финансирование этих мероприятий за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд;
представляет ежеквартально (ежегодно) в установленные сроки в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке Программы, продлении срока ее реализации либо прекращении ее реализации (при необходимости);
представляет в установленном порядке в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет следующие функции текущего управления:
на основании предложений государственных заказчиков по формированию мероприятий Программы определяет тематику, сроки и объемы финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках ее мероприятий;
рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию;
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода ее реализации и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;
выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы;
инициирует экспертизу проектов и экспертные проверки хода реализации Программы;
организует независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
внедряет и обеспечивает применение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы, а также информационное обеспечение портала Программы в сети Интернет.
Руководителем Программы является Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы утверждает:
порядок формирования, функции и полномочия рабочих органов, создаваемых в рамках реализации Программы, в том числе в целях обеспечения осуществления функций текущего управления реализацией Программы, а также порядок принятия ими решений;
порядок взаимодействия государственного заказчика - координатора Программы с основными участниками Программы;
порядок разработки и утверждения конкурсной документации;
порядок проведения независимой экспертизы и мониторинга реализации мероприятий Программы.
До начала реализации Программы государственный заказчик - координатор Программы утверждает и представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации Положение об управлении реализацией Программы, которое определяет:
порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;
механизм корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе ее реализации;
процедуру обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Государственные заказчики Программы в рамках участия в управлении реализацией Программы:
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг) и поставщиков продукции по мероприятиям Программы и заключают с ними государственные контракты (договоры);
подготавливают предложения по уточнению мероприятий Программы;
осуществляют контроль за деятельностью исполнителей Программы;
участвуют в работе координационных и совещательных органов, создаваемых в ходе реализации Программы;
организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;
рассматривают результаты экспертизы проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в отношении их содержания и стоимости;
ежеквартально (ежегодно) в установленные сроки представляют государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Государственные заказчики Программы вправе на основании договоров передавать часть функций государственного заказчика, в том числе функции заказчика-застройщика, подведомственным предприятиям в соответствии с их компетенцией в установленной сфере деятельности.

VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

За начальный год расчетного периода принимается первый год осуществления инвестиций - 2009 год.
Конечным годом расчетного периода для целей долгосрочного прогноза реализации Программы принят 2020 год.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями:
налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, - 201995 млн. рублей;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 21.06.2012 N 617)
бюджетный эффект - 50657 млн. рублей.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105, от 21.06.2012 N 617)
Индекс доходности (рентабельность) для бюджетных ассигнований составит 1,18.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Уровень безубыточности равен 0,57 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и устойчивости Программы к возможным изменениям условий ее реализации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Расчет показателей социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в приложении N 5. Методика оценки социально-экономической эффективности реализации Программы приведена в приложении N 6.
Социальная эффективность реализации Программы обусловлена созданием единого информационного пространства для граждан Российской Федерации.
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить все население Российской Федерации многоканальным цифровым телевизионным вещанием в цифровом формате с гарантированным предоставлением обязательных телерадиоканалов;
абзацы двенадцатый - тринадцатый исключены. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 617;
обеспечить возможность доступа всего населения Российской Федерации к комплексным телекоммуникационным услугам, в том числе широкому выбору телевизионных каналов в каждом домохозяйстве;
обеспечить высвобождение и последующее рациональное использование ограниченного радиочастотного ресурса в масштабах страны;
сократить совокупные бюджетные расходы на создание, эксплуатацию сетей и распространение телерадиоканалов;
расширить масштабы промышленного производства телерадиовещательного оборудования, создать новые и задействовать неиспользуемые производственные мощности, а также дополнительные рабочие места, в том числе в сфере научно-технической деятельности;
способствовать развитию высокотехнологичного сектора экономики, созданию технологической и производственной основы для перехода к информационному обществу, сокращению и полному преодолению отставания Российской Федерации от мирового сообщества в области информационно-коммуникационных технологий.

Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

	Единица измерения	Базовые данные 2008 года	Количественные значения	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
I. Индикаторы	
1.	Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием	тыс. человек	1600	1600	1600	1200	1200	-	-	-	
2.	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов	процентов	33	40	60	80	99	100	100	100	
3.	Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	кв. км	-	-	3189000	4415000	7678600	9028085	13293242	17098246	
4.	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа	процентов	-	-	-	-	-	54	85,9	98	
5.	Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов	-"-	-	-	15	31	52,2	75,3	90,1	98,3	
6.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов	единиц	-	2	17	41	62	81	83	83	
7.	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации)	-"-	-	-	16	24	52	72	81	83	
8.	Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации)	-"-	-	-	4	6	8	24	58	83	
9.	Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием	процентов	15	13	10	6	6	6	6	1,7	
10.	Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях	-"-	-	-	15	31	52,2	75,3	90,1	98,3	
II. Показатели	
11.	Количество введенных в эксплуатацию:										
	объектов опытных зон цифрового вещания	единиц	-	40	16	2	-	-	-	-	
	объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса	единиц	-	-	659	440	499	968	1222	1171	
	центров формирования мультиплексов	-"-	-	-	22	17	29	12	3	-	
	объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса	-"-	-	-	-	-	-	1508	1805	1652	
	объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов	-"-	-	-	-	-	-	79	88	25	
12.	Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом)	-"-	-	40	982	1475	2969	3928	5013	5017	

Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015
ГОДЫ", ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Наименование    │Государст- │                                           Объемы финансирования
     мероприятий,    │  венные   ├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
     источники и     │ заказчики │2009 - 2015 │                               в том числе                               │     Ожидаемые
     направления     │           │   годы -   ├───────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤     результаты
    финансирования   │           │   всего    │ 2009  │ 2010  │ 2011  │  2012 год  │ 2013 год  │ 2014 год  │  2015 год  │
                     │           │            │  год  │  год  │  год  │            │           │           │            │
─────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────
   1. Строительство   Роспечать,   79462,205     494    4678    7981    17074,627    20265,37    18830,71    10138,498   создание и ввод в
   наземных сетей      Россвязь                                                                                          эксплуатацию сетей
   цифрового                                                                                                             наземного цифрового
   телевизионного                                                                                                        эфирного вещания 2
   вещания                                                                                                               мультиплексов с
                                                                                                                         охватом до 98
                                                                                                                         процентов
   федеральный                      44228,33      -     3562    4099      14591      11876,75     6383,58       3716     населения в местах
   бюджет - всего                                                                                                        постоянного
                                                                                                                         проживания;
   в том числе:                                                                                                          создание
                                                                                                                         дополнительных
   капитальные         Роспечать    43306,23      -     3562    4099      14234      11311,65     6383,58       3716     мультиплексов в
   вложения                                                                                                              городах и
                                                                                                                         населенных пунктах
   прочие нужды                      922,1        -       -       -        357         565,1         -           -       с населением более
                                                                                                                         100 тыс. жителей;
                       Роспечать     697,1        -       -       -        357         340,1         -           -       снижение с 15
                                                                                                                         процентов до 1,7
                       Россвязь       225         -       -       -         -           225          -           -       процента доли
                                                                                                                         населения
   внебюджетные                    35233,875     494    1116    3882     2483,627     8388,62    12447,13     6422,498   Российской
   источники - всего                                                                                                     Федерации, не
                                                                                                                         охваченного
   в том числе:                                                                                                          региональным
                                                                                                                         телевидением
   капитальные                     26738,416     284     492    1695     1214,06      6643,51    10975,105    5434,741
   вложения

                       Роспечать   26715,416     284     492    1695     1214,06      6620,51    10975,105    5434,741

                       Россвязь        23         -       -       -         -           23           -           -

   прочие нужды                     8495,459     210     624    2187     1269,567     1745,11    1472,025     987,757

                       Роспечать    8482,459     210     624    2187     1269,567     1732,11    1472,025     987,757

                       Россвязь        13         -       -       -         -           13           -           -

   Разработка          Роспечать     596,14      54      221     300      21,14          -           -           -       создание системных
   системных                                                                                                             проектов,
   проектов сетей                                                                                                        необходимых для
   цифрового                                                                                                             построения наземных
   телевизионного                                                                                                        цифровых
   вещания по                                                                                                            телевизионных сетей
   регионам                                                                                                              по всем субъектам
                                                                                                                         Российской
                                                                                                                         Федерации

   внебюджетные                      596,14      54      221     300      21,14          -           -           -
   источники -
   прочие нужды

   Развитие сети       Роспечать   55274,003     284    3472    7000    15560,901    13687,848   9477,756     5791,498   создание цифровой
   вещания 1-го                                                                                                          наземной сети
   мультиплекса                                                                                                          распространения 1-
   (расширение сети,                                                                                                     го мультиплекса с
   строительство                                                                                                         охватом до 98,3
   сети вещания 1-го                                                                                                     процента населения
   мультиплекса)                                                                                                         в местах
                                                                                                                         постоянного
                                                                                                                         проживания

   федеральный                      40652,48      -     2862    3577      13400      10830,854   6266,626       3716
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   внебюджетные                     7368,101     284     420    1627     985,471     1224,784    1739,105     1087,741
   источники -
   капитальные
   вложения

   внебюджетные                     7253,422      -      190    1796     1175,43      1632,21    1472,025     987,757
   источники -
   прочие нужды

   Строительство,      Роспечать    3498,245      -      772     590     1062,589     896,702     176,954        -       снижение с 15
   техническое                                                                                                           процентов до 1,7
   перевооружение                                                                                                        процента доли
   центров                                                                                                               населения
   формирования                                                                                                          Российской
   мультиплексов                                                                                                         Федерации, не
                                                                                                                         охваченного
   федеральный                        2535        -      700     522       834        362,046     116,954        -       региональным
   бюджет -                                                                                                              телевидением;
   капитальные                                                                                                           создание 83 центров
   вложения                                                                                                              формирования
                                                                                                                         мультиплексов,
   внебюджетные                     963,245       -      72      68      228,589      534,656       60           -       обеспечивающих
   источники -                                                                                                           прием каналов со
   капитальные                                                                                                           спутников и из
   вложения                                                                                                              местных студий, их
                                                                                                                         обработку, включая
                                                                                                                         местные врезки,
                                                                                                                         формирование и
                                                                                                                         последующую
                                                                                                                         доставку пакета
                                                                                                                         каналов на цифровые
                                                                                                                         эфирные передатчики
                                                                                                                         этого региона

   Оснащение           Роспечать    1230,097     156     213     91      429,997       340,1         -           -       создание
   контрольно-                                                                                                           технической базы,
   измерительным                                                                                                         обеспечивающей
   оборудованием                                                                                                         возможность
                                                                                                                         настройки, контроля
   федеральный                       697,1        -       -       -        357         340,1         -           -       и обслуживания
   бюджет - прочие                                                                                                       технологического
   нужды                                                                                                                 оборудования сети
                                                                                                                         цифрового вещания
   внебюджетные                     532,997      156     213     91       72,997         -           -           -
   источники -
   прочие нужды

   Создание сети       Роспечать    14683,97      -       -       -         -         4529,97      6524         3630     создание объектов
   вещания 2-го                                                                                                          цифровой сети
   мультиплекса                                                                                                          распространения
                                                                                                                         каналов, входящих
   внебюджетные                     14584,07      -       -       -         -         4430,07      6524         3630     во 2-й мультиплекс,
   источники -                                                                                                           с зоной вещания,
   капитальные                                                                                                           эквивалентной зоне
   вложения                                                                                                              охвата 1-го
                                                                                                                         мультиплекса
   внебюджетные                       99,9        -       -       -         -          99,9          -           -
   источники -
   прочие нужды

   Организация        Роспечать,     379,75       -       -       -         -         379,75         -           -       формирование 5
   необходимого        Россвязь                                                                                          временных дублей 1-
   количества                                                                                                            го федерального
   временных дублей                                                                                                      мультиплекса,
   пакетов                                                                                                               доставка их в
   телерадиоканалов                                                                                                      центры космической
                                                                                                                         связи федерального
   федеральный                       118,75       -       -       -         -         118,75         -           -       государственного
   бюджет -                                                                                                              унитарного
   капитальные                                                                                                           предприятия
   вложения                                                                                                              "Космическая связь"
                                                                                                                         для передачи на всю
                       Роспечать     118,75       -       -       -         -         118,75         -           -       территорию
                                                                                                                         Российской
   федеральный                        225         -       -       -         -           225          -           -       Федерации с целью
   бюджет - прочие                                                                                                       обеспечения
   нужды                                                                                                                 удобного просмотра
                                                                                                                         населением
                       Россвязь       225         -       -       -         -           225          -           -       телевизионных
                                                                                                                         программ высокой
   внебюджетные                        23         -       -       -         -           23           -           -       четкости с заданным
   источники -                                                                                                           уровнем качества,
   капитальные                                                                                                           надежности,
   вложения                                                                                                              устойчивости

                       Россвязь        23         -       -       -         -           23           -           -

   внебюджетные                        13         -       -       -         -           13           -           -
   источники -
   прочие нужды

                       Россвязь        13         -       -       -         -           13           -           -

   Создание            Роспечать      3800        -       -       -         -           431        2652         717      создание объектов
   дополнительных                                                                                                        цифровой сети
   мультиплексов в                                                                                                       распространения
   крупных городах                                                                                                       каналов, входящих в
                                                                                                                         дополнительные
   внебюджетные                       3800        -       -       -         -           431        2652         717      мультиплексы, в
   источники -                                                                                                           городах и
   капитальные                                                                                                           населенных пунктах
   вложения                                                                                                              с численностью
                                                                                                                         населения более 100
                                                                                                                         тыс. жителей

   2. Создание         Россвязь     24831,5       -     6500   8401,8     2943,2       4847       2070,9        68,6     обеспечение 100
   многофункцио-                                                                                                         процентов населения
   нальных                                                                                                               возможностью приема
   космических                                                                                                           обязательных
   аппаратов, в том                                                                                                      телерадиоканалов;
   числе для                                                                                                             создание
   телерадиовещания                                                                                                      космических
                                                                                                                         аппаратов,
   федеральный                       13000        -     6500    6500        -            -           -           -       предназначенных для
   бюджет - прочие                                                                                                       доставки и
   нужды                                                                                                                 распределения
                                                                                                                         цифровых
   внебюджетные                     11831,5       -       -    1901,8     2943,2       4847       2070,9        68,6     телерадиоканалов по
   источники -                                                                                                           всей территории
   прочие нужды                                                                                                          Российской
                                                                                                                         Федерации

   а) создание         Россвязь      7358,6       -     3500    3000      199,4        594,9       64,3          -       космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ5"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 140 градусов
   федеральный                        6500        -     3500    3000        -            -           -           -       восточной долготы
   бюджет - прочие                                                                                                       для обеспечения
   нужды                                                                                                                 связи и вещания на
                                                                                                                         дальневосточную
   внебюджетные                      858,6        -       -       -       199,4        594,9       64,3          -       зону
   источники -
   прочие нужды

   б) создание         Россвязь      7163,6       -     3000    3500      235,9        373,2       54,5          -       космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ6"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 53 градуса
   федеральный                        6500        -     3000    3500        -            -           -           -       восточной долготы
   бюджет - прочие                                                                                                       для обеспечения
   нужды                                                                                                                 связи и вещания на
                                                                                                                         евразийскую зону
   внебюджетные                      663,6        -       -       -       235,9        373,2       54,5          -
   источники -
   прочие нужды

   в) создание         Россвязь      6439,1       -       -       -       1808,4      2852,8      1737,9         40      космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ7"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 40 градусов
   внебюджетные                      6439,1       -       -       -       1808,4      2852,8      1737,9         40      восточной долготы
   источники -                                                                                                           для обеспечения
   прочие нужды                                                                                                          связи и вещания на
                                                                                                                         евразийскую зону

   г) создание         Россвязь      3870,2       -       -    1901,8     699,5       1026,1       214,2        28,6     космический
   космического                                                                                                          аппарат,
   аппарата                                                                                                              предназначенный для
   "Экспресс-АМ8"                                                                                                        запуска на орбиту в
                                                                                                                         точку 14 градусов
   внебюджетные                      3870,2       -       -    1901,8     699,5       1026,1       214,2        28,6     западной долготы
   источники -                                                                                                           для обеспечения
   прочие нужды                                                                                                          связи и вещания на
                                                                                                                         европейскую зону

   3. Создание         Роспечать     1148,5       -       -       -        158         408,5        394         188      создание на базе
   центра управления                                                                                                     федерального
   фондовыми                                                                                                             государственного
   материалами для                                                                                                       бюджетного
   их учета,                                                                                                             учреждения
   реставрации и                                                                                                         "Государственный
   цифровизации                                                                                                          фонд телевизионных
   федерального                                                                                                          и радиопрограмм"
   государственного                                                                                                      автоматизированной
   бюджетного                                                                                                            системы управления
   учреждения                                                                                                            фондовыми
   "Государственный                                                                                                      материалами,
   фонд                                                                                                                  решение вопросов по
   телевизионных и                                                                                                       их хранению, учету,
   радиопрограмм"                                                                                                        реставрации, а
                                                                                                                         также обеспечение
                                                                                                                         возможности
                                                                                                                         перевода в цифровой
                                                                                                                         формат 12,5 тыс.
                                                                                                                         часов фондовых
                                                                                                                         материалов в год
                                                                                                                         (объем хранилища -
                                                                                                                         16 Пбайт)

   федеральный                       1148,5       -       -       -        158         408,5        394         188
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   а) реконструкция    Роспечать     408,6        -       -       -       107,6         157         144          -       реконструкция
   производственного                                                                                                     существующих зданий
   комплекса                                                                                                             и сооружений
   "Реутово",                                                                                                            производственного
   г. Реутов,                                                                                                            комплекса
   Московская                                                                                                            проектируемой
   область, ул.                                                                                                          мощностью 12127,2
   Железнодорожная,                                                                                                      кв. метра, с
   д. 19, корп. 1, в                                                                                                     объемом хранилища 6
   том числе                                                                                                             Пбайт и
   проектные и                                                                                                           возможностью по
   изыскательские                                                                                                        реставрации,
   работы                                                                                                                обработке и
                                                                                                                         переводу в цифровой
                                                                                                                         формат 6 тыс. часов
                                                                                                                         фондовых материалов
                                                                                                                         в год

   федеральный                       408,6        -       -       -       107,6         157         144          -
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   б) строительство    Роспечать     739,9        -       -       -        50,4        251,5        250         188      строительство
   здания для                                                                                                            здания для хранения
   хранения и работы                                                                                                     и работы с
   с фондовыми                                                                                                           фондовыми
   аудиовидеомате-                                                                                                       аудиовидеоматериа-
   риалами,                                                                                                              лами проектируемой
   г. Реутов,                                                                                                            мощностью 11972 кв.
   Московская                                                                                                            метра с объемом
   область, ул.                                                                                                          хранилища 10 Пбайт
   Железнодорожная,                                                                                                      и возможностью по
   д. 19, корп. 2,                                                                                                       реставрации,
   в том числе                                                                                                           обработке и
   проектные и                                                                                                           переводу в цифровой
   изыскательские                                                                                                        формат 6,5 тыс.
   работы                                                                                                                часов фондовых
                                                                                                                         материалов в год

   федеральный                       739,9        -       -       -        50,4        251,5        250         188
   бюджет -
   капитальные
   вложения

   4. Предоставление   Роспечать   15460,105      -     667,2    816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   государственному
   оператору связи
   субсидий

   федеральный                     15460,105      -     667,2    816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   бюджет - прочие
   нужды

   в том числе:

   а) оплата услуг                   667,2        -     667,2     -         -            -           -           -       обеспечение
   (работ) по                                                                                                            своевременного
   реализации                                                                                                            выполнения
   неотложных                                                                                                            подготовительных
   мероприятий по                                                                                                        мероприятий
   подготовке
   цифрового вещания

   федеральный                       667,2        -     667,2     -         -            -           -           -
   бюджет - прочие
   нужды

   б) возмещение                   14792,905      -       -      816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9    обеспечение
   затрат, связанных                                                                                                     качественной
   с осуществлением                                                                                                      бесперебойной
   эфирной наземной                                                                                                      эфирной трансляции
   трансляции                                                                                                            в создаваемой
   общероссийских                                                                                                        цифровой сети
   обязательных
   общедоступных
   телерадиоканалов

   федеральный                     14792,905      -       -      816      2042,5     3208,435     3907,07      4818,9
   бюджет -
   прочие нужды

   5. Информационно-  Минкомсвязь    562,95       -      51      204       204         34,65       34,65       34,65     насыщение
   разъяснительная      России                                                                                           домохозяйств
   кампания                                                                                                              цифровыми приемными
                                                                                                                         устройствами,
   федеральный                       562,95       -      51      204       204         34,65       34,65       34,65     подготовка не менее
   бюджет - прочие                                                                                                       95 процентов
   нужды                                                                                                                 домохозяйств к
                                                                                                                         приему каналов
                                                                                                                         цифрового эфирного
                                                                                                                         вещания и
                                                                                                                         последующему
                                                                                                                         отключению
                                                                                                                         аналогового вещания

   6. Управление      Минкомсвязь    272,1        -      49      46         46         43,7        43,7         43,7     реализация
   реализацией          России                                                                                           Программы в
   Программы                                                                                                             установленные сроки
                                                                                                                         с заданным уровнем
   федеральный                       272,1        -      49      46         46         43,7        43,7         43,7     эффективности
   бюджет - прочие
   нужды

 Итого по Программе                121737,36     494   11945,2 17448,8  22468,327    28807,655   25281,03    15292,348
     в том числе:

 федеральный бюджет                74671,985      -    10829,2  11665    17041,5     15572,035     10763      8801,25
 - всего

   в том числе:

   капитальные                      44454,73      -     3562    4099      14392      11720,15     6777,58       3904
   вложения

   прочие нужды                    30217,255      -    7267,2   7566      2649,5     3851,885     3985,42     4897,25

 внебюджетные                      47065,375     494    1116   5783,8    5426,827    13235,62    14518,03     6491,098
 источники - всего

   в том числе:

   капитальные                     26738,416     284     492    1695     1214,06      6643,51    10975,105    5434,741
   вложения

   прочие нужды                    20326,959     210     624   4088,8    4212,767     6592,11    3542,925    1056,357
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(введена Постановлением Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации, подлежащие детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы:
а) развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации;
б) строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации.
3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании следующих критериев:
а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации;
б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием;
в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы.
4. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов.
5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование.
6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) задание на проектирование;
б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;
в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;
г) копию решения об утверждении заказчиком проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственными заказчиками Программы;
е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу);
ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения;
и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы;
к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Источники и     │                                 Объем финансирования
     направления     ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    финансирования   │  2009 -  │                                в том числе
                     │2015 годы ├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────
                     │ - всего  │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────
                                       I. Средства федерального бюджета

 Всего                74671,985      -       10829,2     11665     17041,5  15572,035    10763      8801,25

   в том числе:

   капитальные         44454,73      -         3562       4099      14392    11720,15   6777,58      3904
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             30217,255      -        7267,2      7566     2649,5    3851,885   3985,42     4897,25

 Минкомсвязь России     835,05       -         100        250        250      78,35      78,35       78,35

   капитальные            -          -          -          -          -         -          -           -
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие               835,05       -         100        250        250      78,35      78,35       78,35

 Роспечать            60611,935      -        4229,2      4915     16791,5  15268,685   10684,65    8722,9

   капитальные         44454,73      -         3562       4099      14392    11720,15   6777,58      3904
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             16157,205      -        667,2       816      2399,5    3548,535   3907,07     4818,9

 Россвязь               13225        -         6500       6500        -        225         -           -

   капитальные            -          -          -          -          -         -          -           -
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие               13225        -         6500       6500        -        225         -           -

                                     II. Средства внебюджетных источников

 Всего                47065,375     494        1116      5783,8   5426,827   13235,62   14518,03   6491,098

   в том числе:

   капитальные        26738,416     284        492        1695     1214,06   6643,51   10975,105   5434,741
   вложения

   НИОКР                  -          -          -          -          -         -          -           -

   прочие             20326,959     210        624       4088,8   4212,767   6592,11    3542,925   1056,357

 Итого по Программе   121737,36     494      11945,2    17448,8   22468,327 28807,655   25281,03   15292,348

   в том числе:

   капитальные        71193,146     284        4054       5794    15606,06   18363,66  17752,685   9338,741
   вложения

   НИОКР                             -          -          -          -         -          -           -

   прочие             50544,214     210       7891,2    11654,8   6862,267  10443,995   7528,345  5953,607
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 - 2015 ГОДАХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ОПЕРАТОРОМ СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЭФИРНУЮ АНАЛОГОВУЮ
И ЭФИРНУЮ ЦИФРОВУЮ НАЗЕМНУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ОБЩЕРОССИЙСКИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОПЛАТУ УСЛУГ (РАБОТ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
(ЧАСТИ ЗАТРАТ) УКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫХ
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЭФИРНОЙ ЦИФРОВОЙ НАЗЕМНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ
В 2011 ГОДУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
МЕНЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, В 2012 - 2015 ГОДАХ ВО ВСЕХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПРИОБРЕТЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105,
от 05.12.2011 N 1005, от 18.12.2012 N 1332)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидии организации, являющейся оператором связи, осуществляющим эфирную аналоговую и эфирную цифровую наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов на всей территории Российской Федерации (далее - государственный оператор связи), на оплату услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, возмещение затрат (части затрат) государственного оператора связи, связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, и приобретение контрольно-измерительного оборудования (далее - субсидии).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
2. Субсидия предоставляется на возмещение расходов:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
а) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332;
б) государственному оператору связи - на реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, в том числе на возмещение:
расходов, осуществляемых в 2010 году в целях строительства (реконструкции) объектов и связанных с выполнением отдельных видов работ (услуг) по подготовке территории строительства и энергообеспечению (в части получения и реализации технических условий на технологическое присоединение) объектов Программы;
расходов, связанных с организацией в 2010 году спутниковой трансляции пакета обязательных телерадиоканалов на период проведения пусконаладочных работ на сети цифрового наземного вещания;
б(1)) государственному оператору связи - на возмещение затрат (части затрат), связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации. Субсидия направляется на возмещение следующих видов затрат:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
оплата труда персонала, обслуживающего объекты цифрового вещания, в том числе начисление налога на доходы физических лиц и оплата взносов на обязательное социальное страхование;
оплата услуг связи (почта, телеграф, телефон, интернет, мобильная и спутниковая связь);
арендная плата за землю, помещения и производственно-технологическое оборудование;
оплата аренды каналов связи, предоставляемых другими операторами связи на основании заключенных договоров;
приобретение материалов, запчастей, инвентаря, инструментов и горюче-смазочных материалов;
оплата электро- и тепловой энергии;
оплата расходов, связанных с обеспечением охраны объектов, в том числе монтаж систем охраны;
обеспечение противопожарной охраны объектов, в том числе монтаж противопожарных систем охраны, за исключением затрат, включенных в сметы строек;
оплата расходов, связанных с регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также с услугами по оценке имущества и изготовлению документов кадастрового и технического учета;
оплата производственно-технических работ и услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием технологического оборудования;
оплата земельного налога и налога на имущество, а также транспортного налога;
оплата взносов по обязательному и добровольному страхованию имущества;
оплата расходов, связанных с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты (ПРТО);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
оплата за использование радиочастотного спектра;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 N 1005)
в) государственному оператору связи - на приобретение в 2012 - 2013 годах контрольно-измерительного оборудования для эксплуатации на объектах Программы и обеспечения возможности настройки, контроля и обслуживания технологического оборудования сети цифрового вещания.
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332.
4. Субсидия, предоставленная в соответствии с подпунктами "б", "б(1)" и "в" пункта 2 настоящих Правил, выделяется по фактически произведенным расходам на основе заключенных государственным оператором связи договоров о реализации соответствующих мероприятий и приобретении контрольно-измерительного оборудования в пределах предусмотренных на соответствующий период объемов финансирования Программы.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.12.2011 N 1005, от 18.12.2012 N 1332)
5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
6. Предоставление субсидии осуществляется на основе договоров об оплате услуг (работ), обеспечивающих реализацию неотложных мероприятий по подготовке цифрового вещания, приобретение контрольно-измерительного оборудования и возмещение затрат (части затрат) государственного оператора связи, связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в 2011 году в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, в 2012 - 2015 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации, заключенных Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с государственным оператором связи. В указанных договорах предусматриваются следующие условия:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
а) право Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводить проверки соблюдения государственным оператором связи условий, установленных договором;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
б) обязательство государственного оператора связи представлять отчеты об исполнении обязательств, вытекающих из договора, в сроки, порядке и по форме, которые установлены договором;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
в) порядок осуществления контроля за исполнением условий договора, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;
г) порядок возврата сумм, использованных государственным оператором связи, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
7. Перечисление субсидии осуществляется Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям в установленном порядке на основании договоров о предоставлении субсидии на расчетные счета, открытые государственным оператором связи в кредитных организациях.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
8. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)
10. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 18.12.2012 N 1332)

Приложение N 4.1
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕННЫХ ДУБЛЕЙ
ПАКЕТОВ ТЕЛЕРАДИОКАНАЛОВ

(введены Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий оператору связи - федеральному государственному унитарному предприятию "Космическая связь" на возмещение затрат по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (далее соответственно - субсидии, получатель).
2. Субсидии предоставляются на возмещение расходов:
на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го федерального мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь";
на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.
3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Федеральному агентству связи, на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Условием предоставления субсидий является наличие у получателя договора на закупку оборудования компрессии и мультиплексирования, каналообразующего оборудования для организации наземных каналов связи для подачи сигналов 5 временных дублей 1-го мультиплекса из центра компрессии и мультиплексирования федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" в центры космической связи федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" и договоров на закупку приемо-передающего оборудования земных станций спутниковой связи для его установки за счет средств федерального государственного унитарного предприятия "Космическая связь" на существующих площадках (фундаментах) и в аппаратных залах центров космической связи указанного предприятия.
5. Для получения субсидий получатель представляет в Федеральное агентство связи копии договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основе договора о предоставлении субсидии, заключаемого Федеральным агентством связи с получателем в течение 7 дней со дня получения каждого из договоров, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
7. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются следующие условия:
а) целевое назначение субсидии, условия, сроки и порядок предоставления субсидии, а также сроки проведения мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
б) размер субсидии;
в) право Федерального агентства связи на проведение проверок соблюдения получателем условий, установленных договором;
г) порядок возврата средств, израсходованных получателем, в случае установления по итогам проверок, проведенных Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Правилами и договором;
д) порядок и сроки представления получателем отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные Федеральным агентством связи;
е) перечень документов, предоставляемых получателем в Федеральное агентство связи в подтверждение произведенных расходов.
8. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации получателю, в размере, подтвержденном документами о произведенных расходах, предоставленными получателем по форме и в сроки, которые установлены Федеральным агентством связи.
9. Информация о размерах и сроках перечисления субсидий учитывается Федеральным агентством связи при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.
10. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется Федеральным агентством связи и иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. В случае нецелевого использования субсидий они подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

РАСЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2010 N 1105,
от 21.06.2012 N 617, от 12.12.2013 N 1151)

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (далее - Программа) базировались на данных о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников по годам, а также на долгосрочном прогнозе об ожидаемых объемах реализации современных услуг связи.
Эффективность реализации Программы оценивается в течение расчетного периода, за начальный год которого принимается 1-й год осуществления инвестиций - 2009 год. Конечным годом считается 2020 год - год максимального освоения введенных мощностей (исходя из принципов долгосрочного (на 12 лет) планирования).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Коммерческая и бюджетная эффективность Программы определяется с учетом следующих условий:
данные о ресурсном обеспечении Программы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть приведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования (E = 0,1);
размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов;
размер всех налогов и отчислений, поступающих в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, определен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 617.
Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы, приведены в приложении N 1.
Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации Программы приведен в приложении N 2.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Экономическая эффективность реализации Программы в отрасли характеризуется следующими показателями:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) в сфере телерадиовещания за расчетный период (2009 - 2020 годы) составит 51020,518 млн. рублей при общей сумме инвестиций 121737,36 млн. рублей, включая 74671,985 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 47065,375 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
налоговые поступления от реализации Программы предусматриваются в размере 201210,955 млн. рублей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных) за счет чистой прибыли и амортизации составляет 12 лет, бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 8 лет;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
индекс доходности (рентабельности) для бюджетных ассигнований составляет 1,2;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
уровень безубыточности равен 0,58 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и о степени устойчивости Программы к возможным отклонениям от условий ее реализации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)
Итоговые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении N 3.

Приложение N 1
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────
     Показатели     │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │    За
                    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │расчетный
                    │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │          │  период
────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────
 Условно-переменная                 70         70         70         70         70         70         70         70         70         70         70          -
 часть текущих
 издержек
 (себестоимости),
 процентов

 Годовой объем       13748,033  16625,627  18742,468  24995,837  35564,674  51230,591  67001,777  73642,869  77530,175  81417,482  85304,789  89192,096  634996,418
 реализуемой
 продукции отрасли
 (объем продаж),
 млн. рублей, в
 ценах
 соответствующих
 лет

 Инвестиции из всех     494      11945,2    17448,8   22468,327  28807,655   25281,03  15292,348      -          -          -          -          -      121737,36
 источников
 финансирования по
 Программе - всего,
 млн. рублей, в
 ценах
 соответствующих
 лет

 в том числе             -       10829,2     11665     17041,5   15572,035    10763     8801,25       -          -          -          -          -      74671,985
 средства
 федерального
 бюджета - всего,
 млн. рублей

   из них:

   капитальные           -         3562       4099      14392     11720,15   6777,58      3904        -          -          -          -          -       44454,73
   вложения, млн.
   рублей

   внебюджетные         494        1116      5783,8    5426,827   13235,62   14518,03   6491,098      -          -          -          -          -      47065,375
   средства
   (собственные,
   заемные и др.),
   млн. рублей

 Налогооблагаемая     6527,924   6440,292   9957,28   18549,072   30584,31  44901,745   54767,09   55678,67  38476,904  29534,822  19810,707   11155,68      -
 база налога на
 имущество, млн.
 рублей

 Рентабельность,         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         -
 процентов

 Амортизационные         10         9          12         15         16         16         16         17         14         13         12         12         -
 отчисления,
 процентов
 себестоимости

 Материальные            29         28         32         27         26         29         31         32         32         32         32         32         -
 расходы, процентов
 себестоимости

 Фонд оплаты труда,      48         46         40         41         42         40         38         37         37         37         37         37         -
 процентов
 себестоимости

 Налог на                2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          2          -
 имущество,
 процентов

 Налог на прибыль,       20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         -
 процентов

 Подоходный налог,       13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         13         -
 процентов

 Страховые взносы в      26         34         34         30         30         30         30         30         30         30         30         30         -
 Пенсионный фонд
 Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования,
 процентов

 Налог на                18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         -
 добавленную
 стоимость,
 процентов

 Норма дисконта          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -         0,1
 (средняя за
 расчетный период)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 2
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

РАСЧЕТ
КОММЕРЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

───────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────
     Показатели    │ 2009 год  │  2010 год  │  2011 год  │ 2012 год  │  2013 год  │  2014 год  │ 2015 год  │  2016 год  │  2017 год  │ 2018 год  │  2019 год  │  2020 год  │     За
                   │           │            │            │           │            │            │           │            │            │           │            │            │ расчетный
                   │           │            │            │           │            │            │           │            │            │           │            │            │   период
───────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────
                                                         Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

 Годовой объем       13748,033   16625,627    18742,468    24995,837   35564,674    51230,591    67001,777   73642,869    77530,175    81417,482   85304,789    89192,096    634996,418
 реализованной
 продукции отрасли
 без налога на
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей, в ценах
 соответствующих
 лет

 Себестоимость       11026,525   13854,689    15618,723    20829,864   29637,228    42692,159    55834,814   61369,057     64608,48    67847,902   71087,324    74326,747    528733,513
 годового объема
 реализованной
 продукции
 отрасли, млн.
 рублей, в ценах
 соответствующих
 лет

 Прибыль от          2721,508     2770,938     3123,745    4165,973     5927,446     8538,432    11166,963   12273,811    12921,696    13569,58    14217,465    14865,349        -
 реализации
 продукции, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая    6527,924     6440,292     9957,28     18549,072    30584,31    44901,745    54767,09     55678,67    38476,904    29534,822   19810,707     11155,68        -
 база налога на
 имущество, млн.
 рублей

 Налог на             143,614     141,686       219,06      408,08      672,855      987,838     1204,876     1224,931     846,492      649,766     435,836      245,425         -
 имущество, млн.
 рублей

 Налогооблагаемая    2577,894     2629,251     2904,685    3757,893     5254,591     7550,593    9962,087    11048,881    12075,204    12919,814   13781,629    14619,924        -
 прибыль, млн.
 рублей

 Налог на прибыль,    515,579      525,85      580,937      751,579     1050,918     1510,119    1992,417     2209,776     2415,041    2583,963     2756,326     2923,985        -
 млн. рублей

 Чистая прибыль,     2062,315     2103,401     2323,748    3006,315     4203,673     6040,475    7969,669     8839,105     9660,163    10335,851   11025,303    11695,939        -
 млн. рублей

 Амортизационные     1087,987     1237,604     1847,132    3143,785     4677,342     6657,559    8918,618    10208,272     9033,625    8942,082     8732,59      8655,026        -
 отчисления в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Материальные        3185,008     3885,955     5071,315    5695,178     7622,552    12315,122    17416,671   19591,679    21471,956      22856     24293,069     25669,15        -
 затраты в
 структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Фонд оплаты труда   5245,965     6400,48      6319,833    8631,015    12417,645    16938,629    21083,941   22611,159    24781,226    26378,58    28037,131    29625,294        -
 в структуре
 себестоимости,
 млн. рублей

 Налог на            1901,345     2293,141     2460,807    3474,119     5029,582     7004,784    8925,319     9729,214    10090,479    10541,067   10982,110     11434,13        -
 добавленную
 стоимость, млн.
 рублей

 Подоходный налог,    681,975     832,062      821,578     1122,032     1614,294     2202,022    2740,912     2939,451     3221,559    3429,215     3644,827     3851,288        -
 млн. рублей

 Страховые взносы    1363,951     2188,964     2161,383    2606,566     3750,129     5115,466     6367,35     6828,57      7483,93     7966,331     8467,213     8946,839        -
 в Пенсионный фонд
 Российской
 Федерации, Фонд
 социального
 страхования
 Российской
 Федерации,
 Федеральный фонд
 обязательного
 медицинского
 страхования, млн.
 рублей

 Налоги,             4606,464     5981,704     6243,766    8362,375    12117,777    16820,229    21230,875   22931,942    24057,502    25170,342   26286,311    27401,667        -
 поступающие в
 бюджеты всех
 уровней и
 внебюджетные
 фонды (приток в
 бюджет), млн.
 рублей

 Сальдо от           3150,302     3341,005     4170,88      6150,1      8881,015    12698,034    16888,287   19047,377    18693,789    19277,933   19757,894    20350,966    152407,581
 операционной
 деятельности.
 Чистый доход
 организаций
 (чистая прибыль и
 амортизационные
 отчисления), млн.
 рублей

 Коэффициент             1         0,909        0,826        0,751       0,683        0,621        0,564       0,513        0,467        0,424       0,386         0,35          -
 дисконтирования
 (норма дисконта
 E = 0,1)

 Сальдо от           3150,302     3037,277     3447,008    4620,661     6065,852     7884,48     9532,998     9774,316     8720,79     8175,726     7617,523     7132,889    79159,823
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования.
 Чистый доход
 организаций с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина             418,644    10123,051    14787,119    19040,955   24413,267    21424,602    12959,617       -            -            -           -             -           -
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки), млн.
 рублей в ценах
 соответствующих
 лет

 Сальдо суммарного   2731,658    -6782,05     -10616,24    -12890,86   -15532,25    -8726,57      3928,67    19047,377    18693,789    19277,933   19757,894    20350,966        -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности без
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Величина             418,644     9202,773    12220,759    14305,751   16674,590    13302,992    7315,366        -            -            -           -             -       73440,876
 инвестиций из
 всех источников
 финансирования
 (оттоки) с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного   2731,658     -6165,5     -8773,75     -9685,09    -10608,74    -5418,51     2217,632     9774,316     8720,79     8175,726     7617,523     7132,889        -
 потока от
 инвестиционной и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо              2731,658     -3433,84    -12207,59    -21892,68   -32501,42    -37919,93    -35702,3    -25927,98    -17207,19    -9031,47     -1413,94     5718,948        -
 накопленного
 суммарного потока
 от инвестиционной
 и операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования
 (нарастающим
 итогом). Чистый
 дисконтированный
 доход, млн.
 рублей

 Срок окупаемости        -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -            12
 инвестиций
 (период
 возврата), лет

 Индекс доходности       -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           1,08
 (рентабельность
 инвестиций)

                                                            Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

 Средства                -        10829,2       11665       17041,5    15572,035      10763       8801,25        -            -            -           -            -            -
 федерального
 бюджета на
 научно-
 исследовательские
 и опытно-
 конструкторские
 работы,
 капитальные
 вложения и прочие
 нужды (отток из
 бюджета), млн.
 рублей в ценах
 соответствующих
 лет

 Налоги,             4606,464     5981,704     6243,766    8362,375    12117,777    16820,229    21230,875   22931,942    24057,502    25170,342   26286,311    27401,667    201210,955
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды, млн.
 рублей

 Налоги,             4606,464     5437,913     5160,137    6282,776     8276,605    10444,039    11984,275   11767,712    11223,002    10674,682   10134,511     9604,117    105596,234
 поступающие в
 бюджет и
 внебюджетные
 фонды с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Отток бюджетных         -        9844,727     9640,496    12803,531   10635,909     6682,976    4968,076        -            -            -           -            -        54575,716
 средств с учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Сальдо суммарного   4606,464     -4406,81     -4480,36    -6520,75     -2359,3      3761,063    7016,199    11767,712    11223,002    10674,682   10134,511     9604,117        -
 потока от
 финансирования и
 операционной
 деятельности с
 учетом
 дисконтирования,
 млн. рублей

 Чистый              4606,464      199,65      -4280,71    -10801,46   -13160,77     -9399,71    -2383,51     9384,205    20607,207    31281,889    41416,4     51020,518        -
 дисконтированный
 доход государства
 или бюджетный
 эффект, млн.
 рублей

 Индекс доходности       -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           1,2
 бюджетных средств

 Удельный вес            -          0,91         0,67        0,76         0,54         0,43        0,58          -            -            -           -            -            -
 средств
 федерального
 бюджета в общем
 объеме
 финансирования
 (степень участия
 государства)

 Период возврата         -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -            8
 бюджетных
 средств, лет

 Уровень                 -           -            -            -           -            -            -           -            -            -           -            -           0,58
 безубыточности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3
к расчету показателей
социально-экономической
эффективности реализации
федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 12.12.2013 N 1151)

Наименование показателей	2009 - 2020 годы	
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)	121737,36	
  в том числе:		
  средства федерального бюджета	74671,985	
  внебюджетные средства	47065,375	
Показатели коммерческой эффективности	
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)	12	
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли	1,08	
Уровень безубыточности	0,58	
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей)	5718,948	
Показатели бюджетной эффективности	
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей)	105596,234	
Бюджетный эффект (млн. рублей)	51020,518	
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям	1,2	
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)	8	

Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации
на 2009 - 2015 годы"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:
оценку эффективности реализации Программы в целом на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении организаций, с суммарными затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (федеральный бюджет и внебюджетные источники);
оценку эффективности участия в Программе государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расходов федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.
Расчеты выполняются в ценах соответствующих лет с последующим дисконтированием затрат и результатов к начальному году расчетного (программного) периода (2009 - 2020 годы), то есть к 2009 году.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
За начальный год расчетного периода (tн) принимается первый год осуществления затрат (2009 год). Конечный год расчетного периода (tк) определяется исходя из принципов долгосрочного планирования (2020 год).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
В качестве расчетного года (tр) принимается фиксированный момент - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. Для этого расчета принят год проведения расчета (2009 год).
В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности организаций с учетом дисконтирования за расчетный период по следующей формуле:

                                  М
                           ЧДД = SUM (фи  x d ),
                                 m=1    m    m

    где:
    фи    -   сальдо   суммарного  денежного  потока  от  инвестиционной  и
      m
операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
    m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
    d  - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m-периода.
     m
Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности организаций над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.
Расчетный период (2009 - 2020 годы) измеряется количеством шагов расчета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
В качестве шага расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком для расчета (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и так далее. За начальный шаг принимается первый шаг. Для этого технико-экономического обоснования в качестве шага принят 1 год.
Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.
    Приведение  будущих  денежных  ресурсов  (инвестиций,  производственных
издержек,  прибыли  и  так  далее)  к  расчетному  году  расчетного периода
производится   путем   умножения   затрат   и  результатов  на  коэффициент
дисконтирования,   величина   которого   (d )   определяется  по  следующей
                                           m
классической формуле сложных процентов:

                                     1
                             d  = --------,
                              m          m
                                  (1 + E)

где:
E - годовая норма дисконтирования, принятая в размере 0,1;
m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-го шага, а именно:
1 - базовый (начальный) шаг (год);
2 - первый шаг, следующий за базовым шагом;
3 - второй шаг, следующий за первым шагом, и так далее.
Под нормой дисконтирования (E) понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы, с учетом уровня инфляции.
Для настоящего расчета норма дисконта принята в размере 10 процентов.
В свою очередь сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода рассчитываются по следующей формуле:

                                     И      О
                           фи  = (фи   + фи  ),
                             m      m      m

    где:
       И
    фи     -   сальдо   суммарного   денежного   потока  от  инвестиционной
      m
деятельности на m-м шаге расчетного периода;
       О
    фи    - сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности
      m
на m-м шаге расчетного периода.
    Сальдо  суммарного  денежного  потока от инвестиционной деятельности на
                                     И
m-м   шаге  расчетного  периода  (фи  )  определяется  как  разность  между
                                    m
затратами на реализацию Программы из всех источников финансирования (отток)
и реализацией активов (приток), которые в этом случае равны нулю.
    Сальдо  суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м
                               О
шаге  расчетного  периода  (фи  )  определяется  как разность между объемом
                              m
продаж  (приток)  и суммой издержек производства реализуемой продукции (без
амортизационных  отчислений),  налога  на  имущество  и  налога  на прибыль
(отток).   В  итоге  образуется  сумма  чистой  прибыли  и  амортизационных
отчислений, остающаяся у организаций (чистый доход организаций).
Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна нулю.
Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, разделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета, и чем больше внутренняя норма доходности, тем выше эффективность реализации Программы. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что значение чистого дисконтированного дохода равно нулю, по одной из следующих формул:

                               М             1
                        ЧДД = SUM фи  x ----------
                              m=1   m            m
                                        (1 + ВНД)

или

                          М             1
                         SUM фи  x ---------- = 0,
                         m=1   m            m
                                   (1 + ВНД)

    где:
    фи    -   сальдо   суммарного  денежного  потока  от  инвестиционной  и
      m
операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);
ВНД - внутренняя норма доходности.
Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция, встроенная в программу "Excel".
    Срок  окупаемости  инвестиций или период возврата (T  ) - это период от
                                                        ОК
начального  момента времени до момента, когда чистый дисконтированный доход
становится неотрицательным.
Другое определение срока окупаемости - продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы.
В зависимости от начального момента времени, принятого для определения срока окупаемости (периода возврата инвестиций), существует несколько его модификаций.
За начальный момент времени принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, то есть календарное начало первого шага расчетного периода (m = 1) (в данном случае 2009 год, принятый для расчета).
Показателем, используемым при определении срока окупаемости, является сальдо накопленного суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности с учетом дисконтирования.
Целая часть величины срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, добавляемая к целой части, определяется методом интерполяции.
Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, то есть чистого дохода организаций (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат из всех источников финансирования за тот же период.
Если индекс доходности инвестиций больше 1, Программа является эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При значении чистого дисконтированного дохода, равном нулю, индекс доходности равен 1.

Показатели бюджетной эффективности

Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы.
Бюджетный эффект за расчетный период определяется по следующей формуле:

                            М
                      БЭ = SUM (Дельта дельта  x d ),
                           m=1               m    m

    где:
    Дельта дельта    -  превышение доходной части бюджета над его расходной
                 m
частью на m-м шаге расчетного периода;
    d  - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m-периода;
     m
m - порядковый номер шага расчета (от 1 до M).
В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы.
В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются:
налог на имущество в размере 2,2 процента среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
налог на прибыль в размере 20 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество);
налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов объема реализованной продукции;
подоходный налог в размере 13 процентов фонда оплаты труда;
единый социальный налог в размере 26 процентов фонда оплаты труда.
Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе в 2009 году и в размере 34,2 процента фонда оплаты труда начиная с 2010 года.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 N 617)
Доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства) является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, за расчетный период к дисконтированной величине суммарных затрат из всех источников финансирования за тот же период.
Этот показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при оценке бюджетного эффекта. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьшую величину показателя, то есть требующим относительно меньше бюджетных ассигнований.
Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период от начального шага до момента времени, когда бюджетный эффект становится неотрицательным.
Кроме того, срок окупаемости средств федерального бюджета определяется как продолжительность периода, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы.
Определение срока окупаемости (периода возврата) средств федерального бюджета производится аналогично определению срока окупаемости затрат из всех источников финансирования.
Индекс доходности средств федерального бюджета определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета от реализации Программы за расчетный период к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.