Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		
от	13.02.2020	№	460			
		
О внесении изменений в  муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017года №3878 (в редакции от 1 октября 2019года)
	
В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019года №513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 30 января 2020года), постановлением  Правительства Самарской области от 1 ноября 2017года №688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (в редакции от 17 января 2020года)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести в  муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 декабря 2017года №3878 (в редакции от 1 октября 2019года), следующие изменения:
1.1.	В Паспорте Программы:
строку Задачи Программы изложить в следующей редакции:
« 
Задачи Программы	- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области; 
- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городского округа Кинель Самарской области;
- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Кинель Самарской области.	
»;
строку Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой изложить в следующей редакции:
« 
Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных Программой	Общий объем финансирования составляет 212 577,260 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 39 996,876 тыс. рублей;
в 2019 году – 113 771,016 тыс. рублей1;
в 2020 году – 133 809,368 тыс. рублей1;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Средства бюджета городского округа – 11 069,435 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 6 210,416 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 938,551 тыс. рублей;
в 2020 году – 2 920,468 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Иные источники – 201 507,825  тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 33 786,460 тыс. рублей;
в 2019 году – 111 832,465 тыс. рублей1;
в 2020 году –  130 888,900тыс. рублей1;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
__________________________________________
1 - В том числе 75 млн.рублей средств межбюджетного трансферта выделенных бюджету городского округа Кинель, в связи с победой во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях,  отражены в бюджете городского округа Кинель Самарской области как плановое значение,  финансирование данных средств  предусмотрено в 2020году.

 Объем финансирования в 2021-2024годах  вводится в действие отдельными постановлениями Правительства Самарской области.	
»;
в строке Ожидаемые результаты реализации Программы абзац 2 исключить;
1.2. Пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы в 2018 – 2024 годах составляет 212 577,260 тыс. рублей, в т.ч. за счет:
средств бюджета городского округа – 11 069,435 тыс. рублей;
иных источников – 201 507,825 тыс. рублей.»;
1.3.	 Приложение №1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4.	Приложение №6 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5.  Приложение №7 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение №8 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение №10 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.
2.	Официально опубликовать настоящее постановление. 
3.	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.	Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А.А.). 

Глава городского округа						       В.А. Чихирев

Петропавлова61459

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 13.02.2020 №   460
«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа Кинель Самарской «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы»

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение показателя по годам	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Цель: Повышение  уровня комфорта городской среды на территории городского округа Кинель Самарской области 
	
Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД)  городского округа Кинель Самарской области	
1	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД исходя из  минимального перечня работ (с учетом предыдущих лет)	ед.	117	120	1261	1601	1961	2321	2681	
2	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ	%	43,7	44,8	47,01	59,71	73,11	86,61	1001	
Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству и общественных территорий городского округа Кинель Самарской области	
3	Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования (с учетом предыдущих лет)	ед.	5	10	141	181	201	- 1	- 1	
4	Площадь благоустроенных общественных территорий	кв.м.	124,7	135,3	135,81	136,31	136,71	- 1	- 1	
5	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	25,0	50,0	70,01	90,01	1001	- 1	- 1	
Обеспечение повышения уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД городского округа Кинель Самарской области
	
6	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД выполненных при участии граждан и (или)  организаций в общем количестве благоустроенных дворовых территорий в отчетном году	%	100	100	

100	

100	

100	

100	

100	
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1  - показатели подлежат уточнению при утверждении объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, а так же по результатам определения объектов и подготовки проектной документации по ним, подлежащих благоустройству в соответствующем году.».  

Приложение  2
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от 13.02.2020 №   460

«Приложение №6
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах исходя из минимального перечня работ

№ п/п	Адрес МКД	
1.		г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 1	
2.		г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 2	
3.		г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 4	
4.		г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6	
5.		г.Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 8	
6.		г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 53	
7.		г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 76	
8.		г.Кинель, ул. 50лет Октября, д. 105	
9.		г.Кинель, ул. Деповская, д. 30	
10.		г.Кинель, ул. Деповская, д. 31	
11.		г.Кинель, ул. Ж.д.Советская, д. 3 А	
12.		г.Кинель, ул. Ж.д.Советская, д. 6 А	
13.		г.Кинель, ул. Ж.д.Советская, д. 62	
14.		г.Кинель, ул. Ж.д.Советская, д. 8	
15.		г.Кинель, ул. Ж.д.Советская, д. 8 А	
16.		г.Кинель, ул. Завод 12, д. 7	
17.		г.Кинель, ул. Завод 12, д. 12	
18.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 1	
19.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 3	
20.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 4 А	
21.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 5	
22.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 6	
23.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 7	
24.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 8	
25.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 18	
26.		г.Кинель, ул. Заводская, д. 20А	
27.		г.Кинель, ул. Кооперативная, д. 28	
28.		г.Кинель, ул. Крымская, д. 1	
29.		г.Кинель, ул. Крымская, д. 3	
30.		г.Кинель, ул. Маяковского, д. 67	
31.		г.Кинель, ул. Маяковского, д. 73	
32.		г.Кинель, ул. Маяковского, д. 83	
33.		г.Кинель, ул. Мостовая, д. 22	
34.		г.Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А	
35.		г.Кинель, ул. Некрасова, д. 63	
36.		г.Кинель, ул. Некрасова, д. 69	
37.		г.Кинель, ул. Некрасова, д. 71	
38.		г.Кинель, ул. Некрасова, д. 82	
39.		г.Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 120	
40.		г.Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 124	
41.		г.Кинель, ул. Первомайская 12	
42.		г.Кинель, ул. Спортивная, д. 8 А	
43.		г.Кинель, ул. Украинская, д. 26 А	
44.		г.Кинель, ул. Украинская, д. 30	
45.		г.Кинель, ул. Украинская, д. 32	
46.		г.Кинель, ул. Украинская, д. 44	
47.		г.Кинель, ул. Украинская, д. 85	
48.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 25	
49.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 26	
50.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 27 А	
51.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 28	
52.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 30	
53.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 А	
54.		г.Кинель, ул. Ульяновская, д. 31	
55.		г.Кинель, ул. Фестивальная, д. 1	
56.		г.Кинель, ул. Фестивальная, д. 2	
57.		г.Кинель, ул. Фестивальная, д. 4	
58.		г.Кинель, ул. Фестивальная, д. 4 А	
59.		г.Кинель, ул. Фестивальная, д. 6	
60.		г.Кинель, ул. Шоссейная, д. 10 А	
61.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 22	
62.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 38	
63.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 42	
64.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 44	
65.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 42	
66.		г.Кинель, ул. Элеваторная, д. 46	
67.		г.Кинель, ул. Юбилейная, д. 9	
68.		г.Кинель, ул. Южная, д. 35	
69.		г.Кинель, ул. Южная, д. 39	
70.		п.г.т.Алексеевка, ул. Гагарина, д. 1	
71.		п.г.т.Алексеевка, ул. Гагарина, д. 3	
72.		п.г.т.Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 1 А	
73.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 2	
74.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 10	
75.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 17	
76.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 19	
77.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 25 А	
78.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 27	
79.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 27 В	
80.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 29	
81.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 31	
82.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 33	
83.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 35	
84.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 37	
85.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 41	
86.		п.г.т.Алексеевка, ул. Невская, д. 41 А	
87.		п.г.т.Алексеевка, ул. Силикатная, д.2	
88.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 11	
89.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 12	
90.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15	
91.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16	
92.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17	
93.		п.г.т.Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19	
94.		п.г.т.Алексеевка, ул. Уральская, д.55	
95.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2	
96.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3	
97.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 4	
98.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 5	
99.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 6	
100.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 7	
101.		п.г.т.Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 8	
102.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 1	
103.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 9	
104.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 9 А	
105.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 9 Б	
106.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13	
107.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 1 А	
108.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5	
109.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5 А	
110.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 7	
111.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 9	
112.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 11	
113.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 13	
114.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 14	
115.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 15	
116.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 17	
117.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18	
118.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 23	
119.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Специалистов, д. 4	
120.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7	
121.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 13	
122.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14	
123.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 15	
124.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 16	
125.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17	
126.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 19	
127.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 21	
128.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2	
129.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 4	
130.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5	
131.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12	
132.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 74	
133.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79 А	
134.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 А	
135.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85	
136.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 87	
137.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 89	
138.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91	
139.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95	
140.		п.г.т.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 97	
».

Приложение 3
к постановлению администрации городского округа
Кинель Самарской области
от 13.02.2020 №   460

«Приложение №7
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области 
«Формирование современной городской среды 
в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (очередность благоустройства)

№ п/п	Наименование (адрес) общественной территории	Площадь территории, кв.м.	Перечень мероприятий	Сметная стоимость, тыс.рублей	Срок реализации, годы	
1.	Детский парк 
(г. Кинель, ул. Крымская, 22А)
	48854	Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком и различными видами оборудования для игр
	15 238,3	2018	
1.				Устройство скейт-площадки,  установка малых архитектурных форм
	13 264,7	2019	
1.				Устройство «сухого пруда», устройство зоны для спокойного отдыха, устройство освещения и подсветки объектов, озеленение территории, обустройство памятных мест брусчаткой с установкой малых архитектурных форм	- 6	2020	
2.	Сквер по ул. Советской, г.Кинель
(между магазином «Новинка» и больницей ОАО «РЖД»	670	Устройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение	3590,0	2018		
3.	Сквер им.Петрищева по ул.Невской от дома № 10 до дома №8, п.г.т.Алексеевка, г.Кинель 	3096	Обустройство территории сквера: установка малых архитектурных форм,  обустройство детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками
	5 217,2	2018	
			Продолжение благоустройства территории сквера: устройство игровой зоны, парковой зоны с цветниками, устройство площадки для велотриала	- 6	2020	
4.	Спортивная площадка в районе ДОД «Вундеркинд»
(г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Больничная, 4)	629	Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД «Вундеркинд» с установкой спортивных элементов	3469,8	2018	
5.	Спортивная площадка с по ул.Спортивной, г.Кинель (в районе магазина «Максимка»)	1392	Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов
	3 941,0	2019	
6.	Спортивная площадка в районе д. 14 по ул.Спортивной, п.г.т.Усть-Кинельский, г.Кинель	1641	Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов
	-2	2018	
7.	Футбольное поле в п.г.т.Алексеевка
(г.Кинель, п.г.т. Алексеевка,  ул.Гагарина, 17)	14938	Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, хозяйственной постройки около футбольного поля
	4925	2019	
8.	Сквер пл.Мира г.Кинель
(г.Кинель, площадь Мира)	660	Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, озеленение	3447,5	2019	
			Обустройство сквера:  устройство макетов: паровоз, часов и симафора на стойках
	- 4	2019	
9.	Спортивная площадка в районе дома №44 по ул.Украинская, г.Кинель	2 572	Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов
	6 016,5	2019	
10.	Детская площадка в районе дома №92 по ул.Маяковского, г.Кинель	280	Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и соответствующим покрытием
	-2	2018	
11.	Парк Победы
(г. Кинель, ул. Мира, 44)	22 113	Демонтаж памятных пилонов и изготовление новых, озеленение территории, устройство площадок для установки военной техники, установка техники, освещении территории и благоустройство объектов, реконструкция обелиска
		- 7	
12.	Сквер
(г. Кинель, ул. Ульяновская в границах ул. Маяковского и ул. Некрасова)	1 355	Обустройство сквера:  отсыпка площади песком, устройство бортового камня, асфальтирование пешеходной дорожки установка полимерных  фигурок.
	- 4	2019	
			Расширение сквера: Устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек, освещение территории
		- 7	
13.	Сквер им. Ленина
(г. Кинель, ул. Ленина, 36	5 797	Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, устройство игровой детской площадки
	- 6	2020	
14.	Сквер по ул. Завод 12
(г. Кинель, ул. Завод 12, 3)	-1	Озеленение территории, устройство клумб. Освещение и подсветка территории памятника
		- 7	
15.	Концепция общественных пространств «Кинель- город чистых озер»: Общественная территория «Сквер и набережные озера Ладное» и прибрежная территория озера Крымское
	-1	Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное» и благоустройство прибрежной территории озера Крымское в рамках стратегической концепции общественных пространств – «Кинель – город чистых озер»	- 5	2020	
16.	Сквер
(г. Кинель, ул. Украинская)	-1	Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм
		- 7	
17.	Детский сквер
(п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, 17В)	3 105,0	Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм
		- 7	
18.	Сквер Сосновый бор
(п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Речная)	15 724,0	Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории
	- 6	2020	
19.	Универсальная спортивная площадка на территории ГБОУ СОШ №10              (г.Кинель, ул.50 лет Октября, 25А	1 568,0	Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием искусственная трава (хоккей, футбол)	- 3	2019	
20.	Малая  спортивная площадка с оборудованием и элементами для сдачи ГТО (г.Кинель, ул. 50 лет Октября, 108)	150,0	Устройство малой спортивной площадки ГТО	- 3	2019	

________________________________
1 - требует уточнения после проведения постановки на кадастровый учет.
2  -  работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».
3  -  работы проведены в рамках  государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской  области на 2013-2021».
4  -  работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024
5  -  мероприятия будут проведены за счет средств, планируемых к получению  в связи с победой города Кинель на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города численностью населения от 20 тыс.  до 50 тыс. человек».
6 -  перечень работ и сметная стоимость определяются (уточняются) по  результатам  проектно-сметной документации по которой получено заключение независимой экспертизы.
7  -  год проведения работ  определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий.

     - 
		Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
от  _______
Приложение 4
к постановлению администрации городского
 округа Кинель Самарской области
от 13.02.2020 № 460
«Приложение №8	
		к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области 
на 2018-2024годы»	
Информация о финансировании муниципальной программы городского округа Кинель «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018-2024годы»
	
Наименование мероприятия 	Главный распорядитель	Ответственный исполнитель	Период	План по программе
	
				Всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет иных источников	
Подготовка дизайн проектов благоустройства дворовых и общественных территорий	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	680,600	680,600	0,000	
			2018	680,600	680,600	 	
			2019	0,000	 	 	
			2020	0,000	 	 	
			2021	0,000	 	 	
			2022	0,000	 	 	
			2023	0,000	 	 	
			2024	0,000	 	 	
Благоустройство дворовых территорий МКД	Администрация городского округа Кинель 	Администрация городского округа Кинель 	Всего	7 176,336	358,817	6 817,520	
			2018	0,000	 	 	
			2019	7 176,336	358,817	6 817,520	
			2020	0,000	 	 	
			2021	0,000	 	 	
			2022	0,000	 	 	
			2023	0,000	 	 	
			2024	0,000	 	 	
	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	19 455,057	1 474,037	17  981,020	
			2018	10 025,689	1 002,569	9  023,120	
			2019	0,000	 	 	
			2020	9 429,368	471,468 	8 757,900 	
			2021	0,000	 	 	
			2022	0,000	 	 	
			2023	0,000	 	 	
			2024	0,000	 	 	
Благоустройство общественных территорий	Управление архитектуры и градостроительства	Управление архитектуры и градостроительства	Всего	260 265,266	8 555,981	176  709,285	
			2018	29 290,587	4 527,247	24 763,340	
			2019	106 594,679	1 579,734	105 014,945 1	
			2020	124 380,000	2 449,000 	121 931,000 1 	
			2021	0,000	 	 	
			2022	0,000	 	 	
			2023	0,000	 	 	
			2024
	0,000	 	 	
Итого по программе	Всего	212 577,260	11 069,435	201 507,825	
	2018	39 996,876	6 210,416	33 786,460	
	2019	113 771,016	1 938,551	111 832,465 1	
	2020	133 809,368	2 920,468	130 888,900 1	
	2021 2	0,000	0,000	0,000	
	2022 2	0,000	0,000	0,000	
	2023 2	0,000	0,000	0,000	
	2024 2	0,000	0,000	0,000	

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
1 - В том числе 75 млн.рублей средств межбюджетного трансферта выделенных бюджету городского округа Кинель Самарской области, в связи с победой во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, отражены в бюджете городского округа Кинель Самарской области как плановое значение,  финансирование данных средств  предусмотрено в 2020году.

2 - Объем финансирования в 2021-2024годах  вводится в действие отдельными постановлениями Правительства Самарской области.

Приложение 5
к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области
 от 13.02.2020 №   460

«Приложение №10
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Формирование современной городской среды в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы»

Очередность благоустройства дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024годах (по дате подачи заявок)
№
по  протоколу	№ очередности	Адрес МКД	Кадастровый номер земельного участка/ год проведения кадастрового учета земельного участка	Планируемый год проведения работ	Дата протокола Общественной комиссии по рассмотрению заявки	
1	1	г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82А 	63:03:0212049:2491	2018 1	№8 от 24.01.2018	
2	2	г. Кинель, ул. Маяковского, д. 82	63:03:0212049:528	2018		
3	3	г. Кинель, ул. Маяковского, д. 84	63:03:0212049:529	2018		
4	4	г. Кинель, ул. Маяковского, д. 81	-/2019	2018 1		
5	5	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 13	63:03:0401012:567	2018		
6	6	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 15	63:03:0401012:520	2018		
7	7	г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 98	63:03:0212019:514	2018		
8	8	г. Кинель, ул. 50лет Октября, д. 100	63:03:0212019:1783	2018		
9	9	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 25	63:03:0401012:1914	2019 3		
10	10	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 19	63:03:0401014:1436	2020		
11	11	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 17	-
	2020		
12	12	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 16	63:03:0401023:726	2020		
13	13	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Ульяновская, д. 15	63:03:0401014:1434	2020		
14	14	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 3	-
	2020		
15	15	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Шахтерская, д. 2	63:03:0401014:608	2020		
16	16	г. Кинель, ул. Элеваторная, д. 22	63:03:0211013:501			
17	17	г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22	63:03:0211013:525			
18	18	г. Кинель, ул. Мостовая, д. 22 А	63:03:0211013:526			
19	19	г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31	63:03:0212043:501			
20	20	г. Кинель, ул. Маяковского, д. 74	63:03:0212018:543	2019 2		
21	21	г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 28	63:03:0212018:1827			
22	22	г. Кинель, ул. Украинская, д. 44	63:03:0212040:536			
23	23	г. Кинель, ул. Некрасова, д. 82	63:03:0212043:502			
24	24	г. Кинель, ул. Некрасова, д. 71	63:03:0212043:504			
25	25	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Испытателей, д. 13	63:03:0301015:723			
26	26	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 12	63:03:0301015:1696	2019 2		
27	27	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 14	-
			
28	28	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 79А	63:03:0301016:1520			
29	29	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 81 А	63:03:0301016:1788			
30	30	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 12	63:03:0301018:557			
31	31	г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, д. 6	63:03:0212044:515			
32	32	г. Кинель,ул. Маяковского, д. 88	63:03:0212049:2665	2019		
33	33	г. Кинель,ул. Маяковского, д. 90	63:03:0212049:2669	2019		
34	34	г. Кинель,ул. 27 Партсъезда, д. 1	63:03:0212049:524			
35	35	г. Кинель,ул. 50лет Октября, д. 106	63:03:0212019:1781	2019 2		
36	36	г. Кинель, ул. Заводская, д. 18	-
			
37	37	г. Кинель, ул. Первомайская, д. 12	63:03:0101020:557			
38	38	г.Кинель, ул. Заводская, д. 5	63:03:0101005:503			
1	39	г. Кинель, ул. Заводская, д. 3	63:03:0101005:502		№10 от 1.03.2018	
2	40	г. Кинель, ул. Завод 12, д. 12	-
			
3	41	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, 15	63:03:0301010:518			
4	42	г. Кинель, ул. Юбилейная, д. 9	63:03:0101042:617			
1	43	г. Кинель,ул. Маяковского, д. 86	63:03:0212049:2664	2019	№14 от 08.11.2018	
2	44	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 87	-			
3	45	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 5	63:03:0301019:45			
4	46	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 89	-			
5	47	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 4	63:03:0301019:546			
6	48	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Тимирязева, д. 2	63:03:0301016:1779			
7	49	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 91	-			
8	50	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Специалистов, д. 4	63:03:0301010:711			
9	51	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 18	63:03:0301010:502			
10	52	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 23	63:03:0301010:501			
11	53	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 14	63:03:0301010:739			
12	54	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 85	-
			
13	55	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 9	63:03:0301010:517			
14	56	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Селекционная, д. 5	63:03:0301010:733			
15	57	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95	63:03:0301015:1689			
16	58	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7	63:03:0301018:502			
17	59	г. Кинель,ул. Фестивальная, д. 5	63:03:0212043:1408	2019 3		
18	60	г. Кинель,ул. Некрасова, д. 63	63:03:0212018:547			
19	61	г. Кинель,ул. Украинская, д. 85	63:03:0211028:24			
20	62	г. Кинель,ул. Ж.д.Советская, д. 8	63:03:0101027:33			
21	63	г. Кинель,ул. Шоссейная, д. 10А	63:03:0101029:593			
22	64	г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 17	63:03:0301015:574			
1	65	г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30 А	63:03:0212018:1844		№17 от 28.02.2019	
2	66	г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 30	63:03:0212018:546			
1	67	г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д. 17	63:03:0401012:505		№19 от 21.06.2019	
2	68	г. Кинель,  ул. Кооперативная, д. 28	63:03:0101029:683			
___________________________________________________________________________________________________________________
1 -  работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области по повышению безопасности дорожного движения на 2014-2018годы.».

2 -  работы проведены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.

3 - работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области  на 2018-2022 годы».